투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	우포늪 생태체험장 내 서울숲 조성공사 설계변경 시행(2차)

1. 시설과-2683(2018.6.15.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행 중인 『우포늪 생태체험장 내 서울숲 조성 공사』에 대하여 보완사항이 있어 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 우포늪 생태체험장 내 서울숲 조성 공사

나. 공사기간 : 2018. 5. 9. ~ 6. 29.

다. 도 급 비 : 금206,358,000원(금이억육백삼십오만팔천원)

라. 도 급 자 : 세신조경주식회사 대표 서종원

마. 변경사유 : 공사 현장 여건에 따른 설계변경

1) 버드나무(R20) 2주 이식

2) 관찰데크 내 강화유리(1,510*1,510) 설치(안전사고 예방)

바. 변경금액 (증2,542천원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공 급 가 액	187,598,182	189,909,091	증2,310,909
	부가가치세	18,759,818	18,990,909	증231,091
	합 계	206,358,000	208,900,000	증2,542,000

사. 예산과목 : 대외협력담당관, 지방자치단체 교류협력강화(대외협력기금 국내협력계정), 우포늪생태체험장내 서울생태숲조성, 시설비

붙 임    1. 출장결과보고서 1부.

2. 설계변경 서류 각 1부.  끝.

주무관	송재민		조경팀장	이무림		시설과장	06/20 김재균
협조자	재무팀장	代전정아
시행	시설과-2756	(		)	접수		(		)
우			/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)