위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰 (2017년 가로변 버스승차대 제작설치, 알뜰BIT 제작설치)

1. 버스정책과-16051호(2018.6.18.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 2017년 가로변 정류소 이용환경개선사업 관련 「버스승차대 제작설치 및 알뜰BIT 제작설치」에 대해 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내역

계약건명	계약금액	계약자	준공기한
2017년 가로변 버스 승차대 제작설치	￦443,803,370	(유)대명엔지니링 대표 임광택	2018.6.18
2017년 가로변 버스승차대 알뜰BIT 제작설치	￦54,646,200	㈜ 희수정보통신 대표 이미숙	2018.6.26

나. 준공기한 연기내역 : 일괄변경) 2018.8.31

다. 연기사유 : 굴착인허가 추가 행정절차 소요 및 설치반대 일시 공사중지 등

라. 귀책사유 : 서울특별시

붙임 1. 준공기한 연기방침서 1부.

2. 계약자 합의각서 각1부 (2부)

3. 준공기한 연기의뢰서 각1부 (2부)

3. 가로변정류소 개선사업 공정현황 1부.  끝.

	버스정책과장
주무관	이오수		정류소관리팀장	이희신		버스정책과장	06/20 김정윤
협조자	계약1팀장	조현
시행	버스정책과-16315	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사별관 1동 7층	/
전화	2133-2297	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	부분공개(5)