투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사방법 변경 및 정비물량 증·감 사항 통보(2018년 한강공원 야외수영장 보수공사-토목분야)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기반시설과-1697(2018.06.20.)호와 관련하여 「2018년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목분야)」의 공사방법 변경 및 정비물량 증·감 사항 등에 대하여 아래와 같이 통보하오니, 변경 사항을 반영하여 공사감독 업무를 수행하여 주시기 바랍니다.

○ 변경내역

구 분	당 초	변 경	위 치	비 고
타일보수	60㎡	374.6㎡	뚝섬, 여의도, 잠실, 광나루, 잠원	물량증가
단면보수	-	100.8㎡	광나루, 잠원	신규공종
조인트보수	-	156.5m	뚝섬, 잠실	신규공종
콘크리트면 현장갈기	-	3,493㎡	난지 물놀이장	공사방법 변경
도막제거		805㎡	여의도	신규공종
오일스텐칠	1,467.3m	-	뚝섬, 여의도	공종제외
수조내 트렌치 설치	200m	-	뚝섬	공종제외

※ 타일보수 추가정비 물량에 대하여 지급자재(4,880장) 우선 사용

붙 임 : 1. 보고서 1부.

2. 변경 도면(전자우편 송부) 1부. 끝

	서울특별시한강사업본부장
주무관	박지수		기반시설과장	06/20 박일연
협조자
시행	기반시설과-1699	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)