투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 통보「9호선 923공구 건설공사」

1. 도시기반시설본부 도시철도토목부-6984호(2018.06.11.) 및 서울지방경찰청 교통관리과     -8914호(2015.04.07.) 와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내에서 시행하는 9호선 923공구 건설공사 관련 교통안전표지 설치공사      준공일 변경승인 요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로     승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관련 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 9호선 923공구 건설공사 관련 교통안전표지 설치공사

나. 공사위치 : 강동구 둔촌동 산 29번지 ~ 생태공원 교차로 주변

다. 공사기간 : 승인일 ~ 2018. 12. 31.

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
안전표지	도시기반시설본부 (도시철도토목부)	㈜건영이앤씨	㈜트래픽스	㈜창희이엔에스

라. 원인자 및 업체현황

마. 변경사항 : 교차로 #1(신한국주유소) 노후 신호등 교체 및 케이블 지중화 공사 지연으로                   인한 준공일 연기 요청

- 내    용

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
안전표지	도시기반시설본부 (도시철도토목부)	~2016.03.21.	~2018.12.31.

바. 승인 조건

1) 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

2) 교통사고 방지를 위하여 공사전 충분한 공사안내 홍보, 안내표지판 설치 등 준수

3) 공사 작업구간에 통제수를 배치하여 교통혼잡 방지 철저

4) 야간공사 시 공사구간임을 인지 할 수 있도록 밝은 조도유지

5) 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전        시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

6) 교통신호기공사 업무처리 지침 및 원인자 준수사항 이행 철저

7) 교통안전시설 자료 관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

붙임 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울강동경찰서장(교통과장),(주)트래픽스,(주)창희이엔에스
★주무관	박태준		기전과장	06/20 정판식
협조자
시행	기전과-3369	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0367	/전송	02-2040-0365	/	ptj386@seoul.go.kr	/	부분공개(5)