문서번호	도로보수과-5536
결재일자	2018.6.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		강종훈	06/20 이학구
협 조
	주무관			代임동운

2018년 도로사면 정밀점검용역

시행계획 보고(비탈면 8개소)

2018.  06. 20.(수)

서부도로사업소

(도로보수과)

2018년 도로사면 정밀점검용역

시행계획 보고(비탈면 8개소)

중구 예장동 산 5-86 등 8개소에 소재한 도로사면(비탈면)에 대하여 내재되어 있는 위험요인을 조사하여 시설물의 효율을 증진시키고 재해를 예방하기 위한 정밀점검용역을 시행코자함.

□ 시설물 현황

연번	구 분	위 치	연 장	높 이	비 고 (안전등급)
1	비탈면	중구 예장동 산 5-86	100m	10m	C+
2	비탈면	중구 이태원동 262-4	80m	7m	C+
3	비탈면	마포구 상암동 산 35-1	70m	10m	C+
4	비탈면	중구 장충동 산 4-5	132m	10m	C
5	비탈면	중구 장충동 산 14-55	300m	10m	C
6	옹벽+비탈면	중구 회현동 산 1-16	70m	20m	C
7	비탈면	중구 예장동 산 5-89	69m	20m	C
8	옹벽+비탈면	서대문구 영천동 59	209m	20m	C

□ 추진경위

○ 2017.05.15 : 산지경계사면 관리주체 확정(산지방재과-5196)

○ 2017.06.30 : 도로사면 관리자 구분을 위한 의견 제출(도로보수과-6814)

○ 2017.12.13 : 동절기 도로사면 안전점검 시행(도로보수과-12031)

○ 2018.02.28 : 해빙기 도로사면 안전점검 시행(도로보수과-1788)

○ 2018.05.25 : 우기대비 도로사면 안전점검 시행(도로보수과-4803)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 도로사면 정밀점검 용역(비탈면 8개소)

○ 용역목적

- 정밀점검 등을 통하여 내재되어 있는 위험요인을 조사하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보.

- 향후 시설물설계 및 공사 등 사업진행에 반영

○ 주요 과업내용

- 기초자료(설계도서, 점검, 계측 및 보수자료) 수집 및 분석

- 현장조사 및 시험, 상태평가 및 종합평가, 보고서 작성

- 보수․보강 및 유지관리 방안 제시

- 안전점검 편람 재정비 및 주요결함 일상점검매뉴얼 작성

○ 용역기간 : 착수일로부터 60일간

○ 필요예산 : 금37,010천원

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로사면 붕괴예방을 위한 보수.보강, 시설비(401-01)

○ 계약방법 : 수의계약

- 법적 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조5항 및 제30조2항에 의거 용역금액이 5,000만원 미만으로 1인 견적가에 의한 수의계약(여성기업)

- 수의계약 사유 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법제12조의 규정에 의하여 등록된 안전진단전문기관으로 여성기업에 관한 법률 제2조의 규정에 의거 2019년 예산편성 전 긴급히 정밀점검용역을 완료코자 함.

□ 추진일정

○ 기술용역 타당성 심사완료     : 2018. 5. 25

○ 정밀점검용역 계약의뢰        : 2018. 6. 21

○ 용역 착수 및 시행(60일)     : 2018. 7월 ~ 8월

○ 용역완료 및 성과품 납품      : 2018. 8월말

붙 임 : 1. 도로사면 시설물 현황 1부.

2. 도로사면 과업내용서 1부.

3. 용역비 산출내역서 1부.  끝.