문서번호	역사도심재생과-7478
결재일자	2018.6.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	다시세운관리팀장	역사도심재생과장	재생정책기획관		도시재생본부장
유동균	이광구	양병현	강맹훈		06/20 진희선
협 조
	주무관			신명희

-세운상가군 도심산업활성화 방안 및 거점공간 운영계획 수립용역- 준공기한 연기 검토 보고

2018. 6

도시재생본부

(역사도심재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

-세운상가군 도심산업활성화 방안 및 거점공간 운영계획 수립용역- 준공기한 연기 검토 보고

｢세운상가군 도심산업활성화 방안 및 거점공간 운영계획 수립용역｣에 대한 계약 변경(준공기한 연기) 사항을 검토 보고함

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명: 세운상가군 도심산업활성화 방안 및 거점공간 운영계획 수립 용역

❍ 용역기간: 2017. 6. 22. ~ 2018. 6. 21.

❍ 계약금액: 금237,402,000원(금이억삼천칠백사십만이천원)

❍ 계약업체: ㈜디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소, ㈜메타기획컨설팅

❍ 과업내용: 기초조사‧분석, 산업재생 비전 도출 및 목표 전략 수립 등

Ⅱ		추진경위

❍ 2017. 6. 22. : 용역 계약

❍ 2017. 7. 20. : 착수보고

❍ 2017. 8. 2. / 8. 18. : 세운통합회의(1차) / 2차 회의

❍ 2017. 11. 7. : 현장정책워크숍

❍ 2018. 1. 23. : 본부장보고

❍ 2018. 4. 24. : 통합 공정회의 (역도과, 경본 경제정책과, 중구 등)

Ⅲ		계약변경(준공기한) 내용

❍ 변경내용 : 용역기간 연장(증 61일)

구 분	기 정	변 경	비 고
용역기간	‘17. 6. 22. ~ ’18. 6. 21.	‘17. 6. 22. ~ ’18. 8. 21.	증 61일
계약금액	180,000,000원	180,000,000원	변경없음

※ 계약금액 등 기타사항은 변경 없음

❍ 연장사유

- 용역기간 중 사업 대상지 내의 확보되는 거점공간 대상의 현황 변경(소유주 협상 결렬, 신설 공공공간 조성 변경 등)에 따라 운영에 관한 사항(비전, 계획 등)에 변동이 있어 기한 연기가 필요한 사항임

❍ 귀책사유 : 서울특별시

❍ 지체상금 부과 : 미부과

Ⅳ		조치계획

❍ 용역 준공기한 연기 의뢰(→재무과)

붙임  1. 준공기한 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.