문서번호	기반시설과-1696
결재일자	2018.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		박일연	06/20 최진석
협 조

- 신마포나들목 신설공사 -

설계도서의 건설사업관리책임기술자 검토 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

한강사업본부

시  설  부

-신마포나들목 신설공사-

설계도서의 건설사업관리책임기술자 검토결과 보고

『신마포나들목 신설공사』와 관련하여 설계도서를 건설사업관리책임기술자의 검토내용에 따라 수량 변경사항을 반영하고, 비개착공사의 추진기지 설치의 재검토에 따라 가시설 시공의 적정 여부에 대한 검토결과 보고임.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 신마포나들목 신설공사(장기계속)

❍ 공사규모

나들목명	위 치	규 모(m)			비고
		폭	높이	길이
신마포나들목	마포구 용강동 148-2 (마포대교 북단 하류 500m)	5.0	3.5	51.5	비개착구간 30m

❍ 공 사 비 : 총차 4,359백만원, 1차 985백만원

❍ 공사기간 :‘17. 8.30 ~ ‘19. 11. 17 (27개월)

❍ 시공사/감리단 : ㈜우탑건설 /(주)삼안 외 2개사

Ⅱ		검토목적

❍ 건설사업관리 책임기술자가 설계도서의 누락, 오기, 등을 검토하여 공종별 수량변경 사항을 반영하고, 비개착공사의 추진기지 설치를 재검토에 따라 가시설 시공의 적정 여부에 대한 검토결과 보고임.

Ⅲ		보고 내용

❍ 설계도서 검토

- 설계도서의 검토에 따른 수량의 누락, 오기 등의 시공수량 변경

- 육갑문 신축 이음부 및 제외지 옹벽 신축 이음부 다웰바 설치수량          62개⇒162개(증 100개)

- 구조물 도면에 표기된 전선관 수량 미산출  0m⇒96m(증96m)

- 기타 수량의 증·감

❍ 비개착 공사의 추진기지 설치의 재검토(기반시설과-183, 2018.1.23)

- 당초 추진기지 설치구간의 옹벽 규격(2.3m)이 현장조사에 따른 옹벽 규격(6.3m)의 상이에 따른 기존 설계도서 대로 시공이 불가하여 어스앙카 시공 등의 재검토에 따른 가시설 시공수량 변경

- 어스앙카 시공 수량 조정 70본⇒50본(감 20본)

- 띠장 설치 및 철거 시공 수량 조정  372m⇒277m(감 95m)

- 기타 수량의 증·감

❍ 공사비 증‧감

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
개착구간 구조물공사	227,864,645	230,868,619	3,003,974
추진 및 도달기지설치공	536,191,896	494,266,463	41,925,433
추진공	1,353,526,469	1,356,941,641	3,415,172
굴착공	59,003,573	59,003,573	-
구조물공	110,672,880	110,944,030	271,150
부대공	89,304,002	89,304,002	-
구조물 마감공사	106,127,667	106,127,667	-
도로시설공사	103,977,295	103,977,295	-
조경공사	113,572,746	113,572,746	-
공통부대공사	115,528,769	114,731,946	796,823
직접공사비	2,815,769,942	2,779,737,982	36,031,960
제잡비	1,533,630,238	1,499,251,582	34,378,656
도급공사비	4,349,400,180	4,278,989,564	70,410,616
관급자재비	881,982,000	881,831,080	150,920
총공사비	5,231,382,180	5,160,820,644	70,561,536

Ⅳ		건설사업관리 책임기술자 의견

❍ 설계도서의 검토내용(수량산출 오기 및 설계도서의 규격 오기)에 따른 수량변경 및 비개착공사의 추진기지 재검토에 따른 가시설 공사의 수량변경 사항을 설계에 반영하여 시공함이 적정한 것으로 사료됨.

❍ 개략 공사비(감)70,561천원)

Ⅴ		검토 및 조치의견

❍ 건설관리 책임기술자의 설계도서의 검토결과 및 비개착공사의 추진기지 재검토 결과를 반영함으로 공사장의 안전관리와 공사기간 관리가 적정하다고 파단됨.

❍ 우선 공사 추진토록하고, 향후 설계변경시 반영토록 조치코자 함.

붙임 1) 설계도서 검토에 대한 실정보고 1부.

2) 설계도서 검토내용 1부.

3) 추진기지 가시설도 재설계 완료 보고(따로붙임) 1부. 끝.