문서번호	토목부-10563
결재일자	2018.6.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	06/20 김영수
협조
	주무관		박운용

전면책임감리용역 설계변경 시행(15차1회)

-강남순환도로 4공구-

2018. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

전면책임감리용역 설계변경 시행(15차1회)

(강남순환도로 4공구)

본 공사 방음터널구간 전기공사 착수로 전면책임감리용역(15차) 전기감리원 1인 추가 투입(3개월)되어 설계변경 시행하고자 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로4공구 건설공사 전면책임감리용역

○ 규    모 : 도로개설 폭 4~8차로, 연장 2.48km

○ 계약금액 : 전체 9,359,300천원 (책임감리비 7,530, 실시설계비 1,829)

(15차 550,000천원)

○ 용역기간 : 전체 `02.12.30~`19.12.31 (15차 `18.1.1∼`18.12.31)

○ 건설사업관리용역사 : (주)서영엔지니링

□ 설계변경내용

○ 계약금액 변경(15차)

(단위 : 천원)

구 분		변경 전	변경 후	증·감
15차	용역기간	`18. 1. 1∼`18.12.31	`18. 1. 1∼`18.12.31	-
	계약금액	550,000	590,000	증 40,000

○ 설계변경 사유

- 광명시 휴먼시아아파트 옆 방음터널 구간의 전기공사 착수로 감리사보  (전기) 1인을 본 용역 15차 기간동안 3개월간 투입하여 원활한 감리업무 수행  (당초 0개월 → 변경 3개월)

- 본 용역 6월 실제 근무일수 조정

(당초 19일 → 변경 20일)

○ 설계변경 현황

구 분		2018년도														비고
		1월	2월	3월	4월	5월		6월	7월	8월		9월	10월	11월	12월
감리사보 (전기)	당초															-
	변경						14	20	22	10						(66일)
근무일수 (토목)	당초	22	18	21	21	22		19	22	22		18	21	22	20	(248일)
		1월1일													12월31일
	변경	22	18	21	21	22		20	22	22		18	21	22	20	(249일)
		1월1일													12월31일

□ 조치계획

○ 강남순환도로건설공사는 4공구, 8공구 통합예산으로 8공구 감리비에서 40,000천원을 활용하여 아래와 같이 설계변경계약 시행

- 감리비 변경

(단위 : 천원)

전체 감리비	기투입 (2017년까지)	2018년도 금회(15차1회)			잔여 (`19년도분)
		당초	변경	증·감
7,530,000	6,689,200	550,000	590,000	40,000	250,800

붙임 : 변경설계서 1부.  끝.