문서번호	도시철도계획부-5108
결재일자	2018.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	영동대로복합개발과장	도시철도계획부장	도시철도국장
윤득근	김동철	김진팔	전결 06/20 박상돈
협 조
	주무관		이상훈
	주무관		장윤정

「영동대로 지하공간 복합개발」관련 강남권 광역복합환승센터
기본설계용역 지반조사 실정보고 검토결과

2018. 6.14.(목)

도시철도계획부

(영동대로 복합개발과)

영동대로 지하공간 복합개발」관련 강남권 광역복합환승센터
기본설계용역 지반조사 실정보고 검토결과

기본설계용역과 관련하여 기술 자문회의 의견이 반영된 지반조사 실정보고 사항을 검토하고 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 기본설계 지반조사 실정보고(제18-정림-0039호:'18.6.11)

□ 용역개요

○ 용 역 명 :「영동대로 지하공간 복합개발」관련 강남권 복합환승센터 기본설계용역

○ 용역기간 : '18. 2.28. ~ '19. 2.27.(12개월)

○ 용 역 비 : 17,471백만원

○ 용 역 사 : 정림건축 컨소시엄
(정림, 공간, DPA, 유신, 태조, 선진, 설화, 한신)

□ 실정보고 내용

○ 당초 계약수량에서 기술 자문회의 위원별 자문의견을 반영하여 물량증가 및 신규항목을 추가함******************************

****************************************************

**************************************************

***********************************************

********************************************************

○ 본 사업의 대규모, 대심도 복합환승센터의 중요성 등을 감안하여 내실 있는 지반조사를 수행하기 위하여 시추공 물량을 변경하고자 함.

	※ 기술 자문회의 주요의견
****************************** *********************************** ********************************** ***************************************************************** ******************************* ******************************************************** *********************************** *********************************** ********************************* ********************************************************************* ******************************* ************************************************************ ************************** *******************************************************************

□ 지반조사 계획(붙임#3 지반조사 계획서 참조)

*

항 목		단위	당 초 (계약수량)	***	*********		***
현장조사	시추조사	공	15	**	*	**
현장시험	공내재하시험	회	0	*	*	*
	공내전단시험	회	-	*	*	*	****
	현장수압시험	회	-	*	*	*	****
	전기비저항탐사	km	1.1	****	*	****
	GPR탐사	측선	24	**		*
	하향식 탄성파탐사	회	4	*	*	*	*********
	S-PS검층	회	-	*	*	*	****
	시추공 영상촬영	회	-	*	*	*	****
	현장투수시험	회	0	*	*	*
	지표투수시험	회	-	*	*	*	****
실내 토질시험	기본물성시험	회	15	**		*
	실내투수시험	회	-	*	*	*	****
실내 암석시험	비중 및 흡수율시험	회	5	*		*
	단위중량시험	회	0	*	*	*
	일축압축강도시험	회	0	**	*	**
	탄성계수, 포아송비	회	0	*	*	*
	탄성파 속도 시험	회	0	*	*	*
	인장시험	회	-	**	*	**	****
	삼축압축시험	회	-	**	*	**	****
	절리면 전단시험	회	-	*	*	*	****
	암유용성시험	회	-	*	*	*	****
	공진주 시험	회	-	*	*	*	****
지하수 영향분석	장기 지하수위 관측	개소	1	**	*	**
	양수시험	개소	-	*	*	*	****
	순간충격시험	개소	-	**	*	**	****
	지하수 유향유속시험	개소	-	*	*	*	****
시추공 시험발파		회	-	*	*	*	****

□ ****************

(단위:원)

구 분		당 초	***	*********
용 역 금 액		17,471,189,120	**************	*	***********
	1.기본설계 용역비	15,156,099,200	**************		*
	2.측량	101,000,000	***********		*
	3.지반조사	282,000,000	***********	*	***********
	4.BIM 작성	144,000,000	***********		*
	5.조감도/투시도	16,000,000	**********		*
	6.지하수 영향권분석	93,000,000	**********		*
	7.설계안정성 검토	100,800,000	***********		*
	8.부가가치세	1,588,289,920	*************	*	**********

□ 검토결과

○ 본 사업의 대규모, 대심도 복합환승센터의 중요성 등을 감안하여 내실 있는 지반조사를 수행하기 위하여 시추공 물량변경이 필요한 실정임.

○ 기술 자문회의시 위원별 자문의견을 반영하여 시추공 및 심도물량 증가, 신규항목을 추가하고자 함.

*********************************************

********************************************************************************************************************************************

****************************************************

□ 조치계획

○ 상기와 같이 복합환승센터의 중요성을 감안하여 기술 자문의견이 반영된 시추공 변경사항을 승인하여 지반조사에 만전을 기하고자 하며,

○ 기본설계팀으로 하여금 우선 시추공을 시행토록 하고, 추후 추가 경정예산에 반영하여 예산확보후 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 : 1. 지반조사 실정보고(제18-정림-0039호) 1부.

2. 지반조사 실정보고서 1부.

3. 지반조사 계획서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.

5. 지반조사 기술 자문회의 결과보고 1부.  끝.