문서번호	시설개선과-5057
결재일자	2018.6.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이용진		정경수	06/21 박영준
협 조
	주무관			이재권

효창운동장 태양광 발전설비 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

효창운동장 태양광 발전설비 설치 계획

에너지를 생산하고 효율적으로 소비하는「에너지살림도시, 서울」시책에

적극 동참하고자 효창운동장 관람석 여유공간에 친환경 신재생에너지인

태양광 발전설비를 설치하여 에너지 절감 및 온실가스 저감에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진경위

❍ ‘18년 신재생에너지 보급 시 자체사업 수요조사(녹색에너지과-15495, ’17.8.4.)

⇒ 효창운동장 태양광 설치 신청 ⇒ 대상 선정(예산 84백만원 배정)

Ⅱ		추진목적

❍ 에너지 위기와 기후변화에 선제적 대응

❍ 공공시설의 신재생에너지 보급확산에 기여

❍ 체육시설의 유휴공간을 적극 활용하여 친환경 태양광 발전설비 설치

Ⅲ		설치현황

구분	실내체육관	제1수영장	잠실야구장	목동주경기장	효창운동장
설치용량	40kW	50kW	50kW	43kW	30kW
설치연도	2009년	2012년	2013년	2014년	2017년
설치사진

Ⅳ		추진계획

❍ 사업별 소요금액

구 분	규격	수량	금액(천원)
태양광 발전장치(모듈)	25kW	200W×130개	63,100
계통연계형 인버터	25kW	1대
태양광 모듈 지지대	25kW	1식	11,500
모니터링 시스템		1식	4,200
조달수수료		0.54%	426
태양광 설치 감리용역			4,774
합 계			84,000

❍ 발주방법

- 태양광 발전장치, 인버터, 지지대, 모니터링 시스템 : 조달구매

⇒ 효율적인 운영 및 유지관리, 시스템 안정화를 위하여 ‘17년 기 설치된

제품과 동일한 제품으로 설치

- 태양광 설치 감리용역 : 소액수의계약

- 태양광 모듈 접속반부터 전기실 인버터간 전력간선 설치공사는 전기

공사업체(연간단가)에서 별도 시행

❍ 예산금액 : 84,000천원

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수 사업

효창운동장 시설 개·보수, 시설비

❍ 기대효과

- 연간 35,040kWh 전력에너지 생산(30kW×3.2h×365일)

- 연간 6,307천원 전기요금 절감(35,040kWh×180원)

❍ 현장사진

설치위치	설치공간

Ⅴ		추진일정

❍ ‘18. 6. : 태양광 발전설비 조달구매

❍ ‘18. 7. : 태양광 설치 감리용역 시행

❍ ‘18. 7. ~ 09 : 태양광 발전설비 제작 및 설치

❍ ‘18. 9. 30 : 전기안전공사 사용전 검사 및 준공