문서번호	방재시설부-7985
결재일자	2018.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이민영		진재섭	06/21 이임섭
협 조

『남부도로사업소 제설전진기지 조성공사』

실정보고(********) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

『남부도로사업소 제설전진기지 조성공사』

실정보고(********) 검토보고

남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 관련한 ******************* 실정보고건에 대한 검토보고임

<서울시설공단 공사감독1처-3730호(2018.06.14.)>

Ⅰ				사 업 개 요

○ 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

○ 위    치 : 서초구 우면동 446-5일대(강남순환도로 선암교 하부)

○ 규    모 : 부지조성 6,459㎡, 제설전진기지 및 직원대기실 등

○ 공사기간 : 2017. 9. 13. ~ 2018. 5. 31.

○ 도 급 비 : 2,136백만원

○ 시 공 사 : 우륭건설㈜외 1개사

Ⅱ				보 고 내 용

**********************

*****************************

******************************************

**********************

***************************************

*************************************************

***********************

**************************************

***************************************

*******************************************

**********************************

*********************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ				검 토 내 용

○ 서초구 건축협의 지연 및 부지경계 수목이식, 상수도 인입으로 인한 공사지연으로 준공기한을 ‘18.5.31.(80일)까지 1차 연기하였으며(공사감독1처-1090(2018.3.7.)호), 예비준공검사 당시 향후 시설물 사용자인 남부도로사업소 추가 요청사항 반영 및 아스콘 포장 지연으로 인하여 ‘18.6.30.(30일) 2차 연기(공사감독1처-3075(2018.5.21.)호)한 사항에 대한 감독기관(공단)의 실정보고 건으로,

○ 해당 실정보고 건에 대하여 “적정”하다고 판단되어 감독기관에 승인 통보하고 향후 설계변경시 정산하여 반영 조치하고자 함.

붙 임 : 1. 감독기관(공단) 관련문서 1부.

2. 감독기관(공단) 검토보고서 1부.

3. 보고서 및 요약본 각 1부. 끝.