문서번호	기전과-2736
보존기간	년
결재일자	2018.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		代김용문	06/21 박기범
협 조
	주무관			김현태

도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 계획(1차)

2018. 6

남부도로사업소

(기  전  과)

도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 계획(1차)

도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 대하여 시공물량 증․감 에 따른 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

□ 관련규정

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 계 약 자 :****************

❍ 공사기간 : 2018. 2. 28 ~ 2018. 12. 28

❍ 계약금액 : *************

□ 설계변경 내용

❍ 주요 설계변경 내역

공 종	규 격	수 량		단위	증감	비고
		전	후
가로등 세척		1,423	1,067	등	감356
터널등 세척		1,748	1,790	등	증42
지하차도등 세척		2,891	2,575	등	감316
전력케이블설치	CV 10㎟×1C 2열동시	-	1,200	m	증1,200

❍ 1,2,3차 작업완료에 따른 시공물량 내역조정 : 설계변경 내역서 참조

❍ 설계변경 금액 : 변경없음.

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증, 감액	비고
도급비	***********	***********	-

□ 향후 계획

❍ 설계변경 완료 후 1차기성 지급코자 함.

******************************

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.