문서번호	시설관리과-17587
결재일자	2018.6.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박기련		유광창	06/21 代박종일
협 조

설계변경(2차-최종) 심의위원회 개최결과 보고 (2017년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물처리용역)

2018. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

설계변경(2차-최종) 심의위원회 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 「2017년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)」 관련하여 차수별 계약물량 증감에 따른 변경 사유가 발생함에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

1. 설계변경 개요

○ 용 역 명 : 2017년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물처리용역

(장기계속단가계약)-2차(최종) 차수별 설계변경

○ 도 급 자 : ****************

○ 용역개요 : 운반  폐아스팔트 1,239㎥,  폐콘크리트 569㎥

처리   폐아스팔트 2,911톤, 폐콘크리트 1,308톤

○ 계약기간 : 2017. 7. 28 ～ 2018. 6. 30.

○ 도 급 액 : 금115,000,000원

(단위: 원)

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	115,000,000	105,072,700	-9,927,300	감
1차수	66,390,280	66,390,280	0
2차수	48,609,720	38,682,420	-9,927,300	감

○ 설계변경 내용

- 총 계약물량 증·감  사항 변동

- 차수별 계약물량 증·감 사유 발생

구 분		총차수		1차수		2차수
		운반(㎥)	처리(톤)	운반(㎥)	처리(톤)	운반(㎥)	처리(톤)
폐아스팔트	당초	1,239.00	2,911.00	1,053.00	2,474.00	186.00	437.00
	변경	1,162.12	2,730.63	701.12	1,647.63	461.00	1083.00
폐콘크리트	당초	569.00	1,308.00	483.00	1,110.00	86.00	198.00
	변경	487.42	1,120.87	343.42	789.87	144.00	331.00
합 계	당초	1,808.00	4,219.00	1,536.00	3,584.00	272.00	635.00
	변경	1,808	3,851.5	1,044.54	2,437.5	605	1,414

2. 심 의 개 최

○ 심의일시 : 2018년 6월 20일(수) 10:00

○ 심의장소 : 우리사업소 본관(3층) 회의실

○ 심의위원 : 위원장 시설관리과장

위  원 급수운영과(시설6급 권기섭, 시설6급 이상환)

시설관리과(시설6급 박종일, 시설6급 박행종)

3. 심 의 내 용

○ 계약물량 감소에 대한 설계변경 사항으로

- 물량변동의 적정성 여부

- 관련규정 및 적법성 여부

- 설계변경 세부내용 및 사유 등

4. 심 의 결 과

○ 물량변동의 타당성 여부 : 적 정

○ 관련규정 및 적법성 여부 : 적 정

○ 설계변경 세부내용 및 사유 : 적 정

붙임  1) 설계변경사유서 및 변경내역서 각 1부.

2) 설계변경 심의위원회 의견서 1부.  끝.