투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(금속제창) 변경계약 및 납품기한 연장의뢰(남산예장자락 재생사업)

1. 우리본부에서 시행중인「남산예장자락 재생사업」관급자재(금속제창) 구매내역을 아래와 같이 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 구매물품 변경내용(수량변경 및 납품기한 변경)

계약번호 (납품요구번호)	품 명	규 격	단위	수량 변경		증감	납품기한 변경		계약자
				당초	변경		변경전	변경후
00178238202 (12-18-1-33645-02)	금속제창	DHE-CAW-01	kg	362.90	160.68	(감) 202.22	2018.6.23.	2019.7.20	㈜대흥엔지니어드우드
	단열복합 미서기창	DHE-SS-01	kg	352.80	242.55	(감) 110.25	2018.6.23.	2019.7.20
	갤러리창	GAL-01	kg	27.72	27.72	-	2018.6.23.	2019.7.20

나. 변경사유 : 외벽디자인 변경 및 선행공정(소방재난본부 리모델링) 지연으로 인한 물량 및 납품기한 연기

붙임  관급자재 납품기한 연기 및 계약물량 변경 요청서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	이정빈		의료시설과장	이형재		건축부장	06/21 임인구
협조자
시행	건축부-8546	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	ljbeen@seoul.go.kr	/	부분공개(5)