투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	정림건축컨소시엄 대표 임진우 귀하
(경유)
제목	영동대로 복합개발사업 기본설계용역 지반조사 실정보고 승인 알림

1. 제18-정림-0039호(2018.6.11.)관련입니다.

2. 영동대로 복합개발사업 기본설계용역의 지반조사 공종과 관련하여 실정보고서 검토결과 대규모, 대심도 복합환승센터의 중요성을 감안하여 내실있는 지반조사 수행 및 시험이 될수 있도록 지반조사 실정보고를 승인하오니 지반조사 수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 시추공 : 당초 15개소(15공) → 변경 30개소(36공).

붙임 : 기본설계용역 지반조사 실정보고 검토결과 방침서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤득근		영동대로복합개발과장	김동철		도시철도계획부장	전결 06/21 김진팔
협조자	주무관	장윤정		주무관	이상훈
시행	도시철도계획부-5168	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 10층	/
전화	02-772-7191	/전송	02-772-7304	/	yoon09140@seoul.go.kr	/	부분공개(5)