투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건 건설폐기물 처리용역」설계변경 시행 및 계약의뢰

우리 본부에서 시행 중인 「2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건 건설폐기물 처리용역」와 관련하여 붙임과 같이 설계변경을 시행 하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건 건설폐기물 처리용역

2. 위    치 : 반포, 이촌한강공원

3. 용역기간 : 2018.5.16. ~ 6.24.

4. 용역업체 : *************

5. 설계변경 사유 : 현장여건변화에 따른 발생폐기물 성상 변동

6. 계약금액                                                (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역비		14,288,000	15,466,000	1,178,000
용역비	공급가액	12,989,091	14,060,000	1,070,909
	부가가치세	1,298,909	1,406,000	107,091
	계	14,288,000	15,466,000	1,178,000

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	박지해		녹지관리과장	06/22 문경재
협조자
시행	녹지관리과-2666	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)