문서번호	녹지관리과-2664
결재일자	2018.6.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
박지해	문경재	06/22 김인숙

「2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건 건설폐기물 처리용역」

설 계 변 경  검 토 보 고

2018. 6.

한강사업본부

(녹지관리과)

「2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건 건설폐기물 처리용역」

설 계 변 경  검 토 보 고

우리 본부에서 추진하는 「2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건 (2018년 이촌한강공원 풋살장 등 조성공사) 건설폐기물 처리용역」 추진과 관련하여 현장여건 변경에 의한 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 함

사업현황

용 역 명 : 2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건(2018년 이촌한강공원 풋살장 등 조성공사) 건설폐기물 처리용역

위    치 : 반포한강공원, 이촌한강공원

용역내용

사 업 명	내 용
2018년 반포한강공원 농구장 조성공사	┏ 폐기물 운반 : 폐아스콘 69㎥ ┗ 폐기물 처리 : 폐아스콘 162.15톤
2018년 이촌한강공원 풋살장 등 조성공사	┏ 폐기물 운반 : 폐콘크리트 5.5㎥, 폐아스콘 93.87㎥ ┗ 폐기물 처리 : 폐콘크리트 12.65톤, 폐아스콘 220.59톤

용역기간 : 2018. 5. 16. ~ 6. 24.

용 역 비 : ************

도 급 자 : *************

설계변경 사유

반포한강공원 농구장 조성공사 추진과 관련하여 기존 바닥포장(폐아스콘) 철거중 폐콘크리트 물량이 추가로 발견됨

따라서 현장여건 변동에 따른 폐콘크리트 물량 추가 반영 및 폐아스콘 일부 물량 감소를 반영하여 설계 변경 추진하고자 함

설계변경 세부내용

구 분

변경사유

세부내용

변경

▶ 기존 포장철거(552㎡)에 따른

폐콘크리트 물량 변동으로 인한 물량 증가

〔반포한강공원 농구장 조성공사〕

-폐콘크리트 운반  : 5.5㎥  → 93.5㎥

▶산출근거 : 552㎡ × (T15~T20) ≒ 88㎥

-폐콘크리트 처리 : 12.65TON → 215.05TON

▶ 기존 포장철거(552㎡)에 따른

폐아스콘 물량 변동으로 인한 물량 감소

〔반포한강공원 농구장 조성공사〕

-폐아스콘 운반 : 162.87㎥ → 92.1㎥

▶산출근거 : 552㎡ × (T10~T15) ≒ 70.77㎥

-폐아스콘 처리 : 382.74TON → 216.44TON

기타

▶ 이윤, 부가세 등 순공사비 변동에 따른 변동사항 반영

- 이윤, 일반관리비, 부가세 등

변경금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
****		**********	**********	*********
***	****	**********	**********	*********
	*****	*********	*********	*******
	*	**********	**********	*********

조치계획

상기와 같이 「2018년 반포한강공원 농구장 조성공사 외 1건 건설폐기물 처리용역」 설계변경을 시행하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 변경내역서 1부.  끝.