투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 준공기한 연기 계약의뢰(한남2고가 철거 및 BRT 설치공사)

1. 우리 부에서 시행 중인 「한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역

나. 용 역 비 : 금 655,181천원 (금육억오천오백십팔만천원)

다. 용역기간 : `17. 12. 21. ~ `18. 6. 30.

라. 용역업체 : 주식회사 아이케이(대표자 : 이상진)

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계)

고가차도 철거, 시설비

바. 변경현황

[단위 : 천원]

구 분	전체분		비 고
	당 초	변 경
용 역 비	655,181	655,181	용역비 및 내역변경 없이 기간 변경
용역기간	`17. 12. 21. ~ `18. 6. 30.	`17. 12. 21. ~ `18. 11. 30.

사. 설계변경 사유

- 폐기물용역의 선행공종인 토목공사의 준공기한 연기

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 감리단 검토의견서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	임준우		도시고속도로과장	명경출		토목부장	06/22 김영수
협조자	주무관	백종임		★경리과장	최정수
시행	토목부-10754	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	junu0301@seoul.go.kr	/	부분공개(6)