문서번호	방재시설부-8135
결재일자	2018.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
윤석채		오춘섭	06/25 이임섭
협 조
	주무관			김자환

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)』

설계변경(총차5회, 2차2회 정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)』

설계변경(총차5회, 2차2회 정산) 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리부에서 시행 중인『경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)』설계변경(총차5회, 2차2회 정산) 검토보고임.

[▸관련공문 : 선진경춘감-18-104호(2018.06.22.)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 노원구 경춘선 폐선부지

○ 규    모 : 공원조성 85,038㎡ (L=2.9㎞)

○ 기    간 : 2017. 01. 02. ~ 2018. 06. 30.

○ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

○ 계약현황                                           (단위:천원)

구 분	도 급 비	공 사 기 간	비 고
총 차	5,663,900	2017. 01 .02. ~ 2018. 06. 30.
1 차	3,780,700	2017. 01. 02. ~ 2017. 10. 31.	<준공>
2 차	1,883,200	2017. 11. 01. ~ 2018. 06. 30.

Ⅱ		계약변경(정산) 검토내용

○ 도급비 증‧감액                                      (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 차	5,663,900	5,656,310	감 7,590
1 차	3,780,700	3,780,700	-	<준공>
2 차	1,883,200	1,875,610	감 7,590

○ 변경(정산)내역 (직접공사비)

(단위:백만원)

구분	전 체(총차)			1차분(준공)			2차분			비고
	당 초	변 경	증 ‧ 감	당 초	변 경	증 ‧ 감	당 초	변 경	증 ‧ 감
조경	3,225	3,205	감 20	1,933	1,933	-	1,292	1,272	감 20
토목	650	685	증 35	555	555	-	95	130	증 35
건축	214	214	-	214	214	-	-	-	-
설비	26	26	-	26	26	-	-	-	-

○ 분야별 주요 변경(정산)내용                      (단위:백만원)

구 분	주 요 내 용	증 ․ 감	비 고
계		감 7
조 경	- 주관부서(푸른도시국) 요청사항 반영 · 종합안내 강화를 위한 안내시설 보완 · 공로자표기판 설치 반영 등 - 유지관리부서(중부공원녹지사업소) 요청사항 반영 · 보행로 폭 확장 및 포장재질 협의 반영 · 기존 감나무 이식 및 방문자센터 안내판 설치 · 산책로 주변 계획수종 변경 요청 · 잔디마당 산책동선 변경 등 - 현장여건 감안 및 민원사항 등에 따른 물량 추가 및 조정 - 추가 요구사항 반영(예비준공검사시) · 안전 및 미관 향상 고려 관목 추가 등	감 20	실정보고 5건 등
토 목	- 유지관리부서(중부공원녹지사업소) 요청사항 반영 · 우수유입 방지 측구수로 설치(민원사항) 등 - 공사 현장여건 반영 등에 따른 물량 증감 · 발생폐기물에 따른 철거공 추가 · 안전시설 보강 및 배수시설 추가 설치 등	증 35	실정보고 7건 등
기 타	- 제경비 등 정산 처리	감 8

Ⅲ		책임건설사업관리기술단 검토의견

○ 경춘선 폐선부지 공원조성 공사(3단계) 시행 중 전제분 제5회, 2차분 제2회 설계변경 서류를 상기와 같이 관련법규에 의거 검토 결과, 조경, 토목분야의 변경에 대한 기 실정보고 승인사항 및 예비준공검사결과 조치를 반영한 사항으로 공사계약일반조건 제20조에 의거 설계변경(제잡비 정산) 요청에 대하여 계약금액을 조정함이 적정하다고 판단됨.

Ⅳ		조치 계획

○ 기 실정보고된 사항 및 공사현장 여건, 제경비 등에 따른 설계변경(정산) 사항으로 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어, 설계변경(총차5회, 2차2회 정산) 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 감리사 검토의견 공문 및 변경(정산)설계서 각1부.

2. 계약금액조정 검증확인서(정산) 및 산업안전보건관리비 검토결과서 각1부.  끝.