투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 변경 승인 요청

1. 도로보수과-484호(`18.01.17.) 및 기전과-569호(`18.01.18.)와 관련됩니다.

2. 우리본부에서 시행중인 「한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사」의 “교통안전시설물(노면, 표지) 원인자부담공사”에 대하여 아래와 같이 변경 승인 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 원인자부담공사 공사개요(변경사항 포함)

가. 건  명 : 교통안전시설물 설치공사(한남2고가 철거 및 BRT 설치공사)

나. 위  치 : 용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단(한남5거리 일대)

다. 기  간 : 공사승인일로부터 ~ (변경)`18.11.30. (← 당초 `18.06.30.)

라. 발주처 : 도시기반시설본부 토목부

마. 설계사 : ㈜트래픽스

바. 시공사 : ㈜미성기업

사. 감리사 : ㈜트래픽스

붙 임 : 원인자부담공사 변경승인요청 서류 일체(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
주무관	임준우		도시고속도로과장	명경출		토목부장	06/25 김영수
협조자	주무관	백종임
시행	토목부-10838	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	junu0301@seoul.go.kr	/	대시민공개