문서번호	복지정책과-11555
결재일자	2018.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설지원팀장	복지정책과장
황지애	오은미	06/25 배형우

2018년 확정기능보강사업 계획 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시복지재단	사업 타당성 검토	타당

2018. 6

복 지 본 부

(복지정책과)

2018년 확정기능보강사업 계획 변경 검토 보고(정릉외 8개소)

2018년 확정기능보강사업 중 자치구의 계획 변경 승인 요청이 있어 서울시 복지재단의 타당성 검토를 실시하고 그 결과를 보고드림

1. 정릉사회복지관(광진구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명

- 노후화된 컴퓨터 프로그램실 환경개선 공사 → 프로그램실 환경개선 공사

- 노후화된 컴퓨터 프로그램실 전산장비 교체 → 프로그램실 기자재 교체

◯ 변경내용 : 사업 대상을 컴퓨터 프로그램실에서 프로그램실로 변경

◯ 총사업비 : 32,231천원 → 32,231천원

◯ 변경사유

-  당초 신청한 컴퓨터 프로그램실 개선공사는 낮은 컴퓨터 사양 등 운영상 어려움이 있어 다양한 교육이 가능한 프로그램실로 환경 개선하는 것으로 변경 신청함.

-  또한 프로그램실이 다목적 교육실의 용도로 사용되기 위해 필요한 책상, 걸상 등 기자재가 부족하여 향후 이용에 불편이 예상되어 전산장비 교체를 프로그램실 기자재 교체로 사업 변경 신청

************************************************

*******************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************

************************************************************************************************************************************

**********************************************************************

***********************************************************

2. 중곡사회복지관(광진구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 석면해체공사

◯ 변경내용 : 사업비 변경

◯ 총사업비 : 72,000천원 → 60,000천원(12,000천원 감액)

◯ 변경사유 : 구의회 예산안 심의과정에서 예산 감액되어 사업 변경 신청

************************************************

***************************************

*******************************************************************************************************************************

***************

***************************************************************************************************************

3. 번동3사회복지관(강북구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 장애인 화장실 공사

◯ 변경내용 : 양변기 교체 개수 및 화장실 출입문 자재 변경

◯ 총사업비 : 20,486천원 → 21,875천원(자부담 1,389천원 증액)

◯ 변경사유

- 여자화장실의 장애인공간 협소가 예상되어 일반 양변기의 수량을 축소(0→1)하여 장애인화장실 공간 확대로 장애인의 이용편의를 도모하고자 변경신청함.

- 장애인자동문공사중 ①입구의 장애인 자동문은 내부에서 잠김이 가능한 타입에서 외부에서만 시건이 가능한 일반자동문타입으로 사양을 변경 ②남녀화장실의 스텐강화도어(2개)의 개폐시 휠체어 출입이 어려운점을 감안하여 반자동문(2개)으로 사양변경하여 장애인출입이 용이하게 하고자 변경 신청함.

************************************************

*************************************

*************************************************************************************************************************************

***************

***********************************************************************************************************************************

*********************************************************

4. 구세군사회복지관(강북구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 승강기 노후 부품 교체

◯ 변경내용 : 기존 신청 부품의 단종으로 교체 부품 내용 변경

◯ 총사업비 : 9,905천원 → 9,632천원(총액 273천원 감액)

◯ 변경사유

- 제동장치의 부분 부속의 단종으로 기존 사업 시행의 어려움이 있어 제동장치를 제외한 승강기 출입문의 도어 행거 및 전자제어판 교체와 승강기 출입문 도어모터 ASY 교체를 추가하여 변경 신청

************************************************

**********************************

**********************************************************************************************************************************

***************

*****************************************************************************************

5. 자양사회복지관(광진구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 경로식당 조리실 노후 타일 철거 후 교체

◯ 변경내용 : 바닥방수 처리 공정 추가

◯ 총사업비 : 8,679천원 → 9,449천원(자부담 770천원 증액)

◯ 변경사유 : 경로식당 노후 타일 철거 후 타일 설치 전, 방수 처리 공정 추가

************************************************

***********************************

*******************************************************************************************************************************

***************

*********************************************************************************************************************

6. 자양사회복지관(광진구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 하늘정원 노후데크 철거 및 방부목 설치

◯ 변경내용 : 도색공사 추가

◯ 총사업비 : 4,884천원 → 5,500천원(자부담 616천원 증액)

◯ 변경사유 : 방부목의 변형 및 변색을 방지하기 위하여 오일스텐 도색공사 추가

************************************************

***********************************

*************************************************************************************************************************************

***************

*****************************************************************************************

6. 동작사회복지관(동작구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 노후 냉난방기 교체

◯ 변경내용 : 냉난방기 일부 수량 및 용량 변경

◯ 총사업비 : 49,745천원 → 49,741천원(총액 4천원 감액)

◯ 변경사유

- ’17년 10월 주민참여예산사업의 일환으로 지역주민카페 공사를 통해 강의실 등이 변경되어 냉난방기 설치장소 변경 신청

************************************************

********************************

***********************************************************************************************************************************

***************

**************************************************************

7. 홍은사회복지관(서대문구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 하이샤시 이중창 설치

◯ 변경내용 : 사업비 변경

◯ 총사업비 : 15,664천원 → 18,036천원(자부담 2,372천원 증액)

◯ 변경사유

- 당초 수행예정 업체에서 하중보강공사를 진행할 수 없게 되어, 해당 부분을 타 업체에서 공사를 진행함에 따라 확정된 예산보다 공사비가 초과하여 이를 자부담하는 내용으로 계획 변경 신청

************************************************

*************************************

************************************************************************************************************************************

***************

*************************************************************

*********************************************************

8. 신림사회복지관(관악구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 노후 창호 교체 공사

◯ 변경내용 : 창호 사양 변경 및 누락된 복구비용 추가

◯ 총사업비 : 71,162천원 → 71,162천원

◯ 변경사유

- 주변 마감부 복구비용이 누락되어 추가하고, 변경하기로 한 플라스틱이중창을 단창으로 바꾸는 대신 유리사양을 일반유리 22T→로이유리 24T로 변경 신청

************************************************

*******************************

************************************************************************************************************************************

***************

*************************************************************************************

*********************************************************************

************************************************************************************************************************************************************

9. 신림사회복지관(관악구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 지하 주차장 환경 개선 공사

◯ 변경내용 : 진입로 벽면 철거 후 대리석 벽면 설치를 도색 마감으로 변경

◯ 총사업비 : 26,840천원 → 19,899천원(총액 6,941천원 감액)

◯ 변경사유

- 당초 지하 주차장 진입로 벽면의 장애물을 철거하고, 대리석 자재를 사용해 벽면 보강을 계획하였으나, 더 넓은 진입로 확보 및 좌우 진입로 형태의 통일성 유지를 위해 단순 도색으로 공사를 변경 신청

************************************************

******************************

*************************************************************************************************************************************

***************

*************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

*********************************************************

9. 신목사회복지관(양천구)

□ 변경요청

◯ 사 업 명 : 외벽 보수 공사

◯ 변경내용 : 마감재 및 사업 범위 변경

◯ 총사업비 : 110,270천원 → 82,767천원(총액 27,503천원 감액)

◯ 변경사유

- 본관, 교육관의 외장 교체에 적용한 외단열마감공사의 최종마감재와 단열재가 불연재가 아니므로 당초 ‘일반스티로폼단열재 + 마감재’가 적용된 외단열마감공사를 ‘준불연단열재+마감재’인 외단열마감공사로 변경하고자 함.

- 이 경우 마감재변경으로 인해 당초 본관 및 교육관 외단열마감공사 ㎡당 직접공사비 단가가 78,000원에서 106,504원으로 증액되어 외벽교체 필요성이 시급한 본관만을 사업 대상으로 범위를 축소하여 82,767천원으로 사업 변경을 신청함.

****************************************************

*********************************

************************************************************************************************************************************************

***************

****************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************

*************************************************

별 첨 : 1. 서울시 복지재단 타당성 검토 각 1부.

2. 변경신청 및 검토의견서 각 1부.  끝.