＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	반포배수지 내부 방식공사 부족예산 조치 요청

1. 시설관리과-1241(2018. 2. 7.)호 및 시설관리과-4479(2018. 5. 24)호와

관련입니다.

2. 위 대호에 의거 반포배수지(1~2지) 내부 방수방식공사에 대해서 계열별 공법선정 결과에 따라 실시설계를 한 바, 예산 부족으로 인하여 공사를 할 수 없기에  부족예산에 대한 조치를 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 반포배수지(1,2지) 내부 방수․방식공사

○ 공사개요 : 면적 26,091㎡(도막9,341,패널7,619,시트9,131)

나. 예산배정 요청현황                                      (단위:백만원)

구 분	예산배정금액	실시설계금액	부족금액	비 고
사업비	2,760	5,648	2,888

다. 예산 부족사유

○ 사업 실시설계 내부방식 물량 증가

․당초 18,638㎡ → 변경 26,091㎡(7,453㎡ 증가)

○ 당초 예산배정 산출근거

․2016년도 정밀점검용역 검토보고서의 개략공사비를 반영

※ 개략공사비에는 제경비가 미반영됨(약 40%)

○ 2016년에 산출된 예산으로 2년이 경과되어 노임 및 자재비 등 증가

따로붙임 : 1 반포배수지(1~2지) 내부방수방식공사 설계내역서 각1부.

2. ‘16년도 서초배수지등 정밀정검용역검토 개략공사비 보고서1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	윤복철		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	06/25 최규해
협조자
시행	시설관리과-11019	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4891	/전송	02)3146-4939	/	yun2113@seoul.go.kr	/	부분공개(5)