투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사)

우리 본부에서 시행중인 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사와 관련 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

2. 공사기간 : 2017.12.11 ~ 2018.06.30

3. 계 약 자 : ㈜삼영기업 대표 금동흠

4. 계약금액 : 777,552,590원

5. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	777,552,590원	777,552,590원	변경없음
준공기한	2017.12.11 ~2018.06.30	2017.12.11 ~2018.08.31	증 62일

6. 연기사유 : 선행 공정 토목공사 준공기한 연기에 따른 전기공사 준공기한 연기

붙임  1. 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이동훈		건축설비과장	김은덕		설비부장	06/25 권오식
협조자
시행	설비부-8562	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	behappy6643@seoul.go.kr	/	대시민공개