투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2018년 이촌한강공원 풋살장 등 조성공사

1. 녹지관리과-2610(2018.6.19.)호와 관련입니다.

2.「2018년 이촌한강공원 풋살장 등 조성공사」건에 대하여 다음과 같이 변경          계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

공 사 명	2018년 이촌한강공원 풋살장 등 조성공사
계약상대자	(주)세인환경디자인 (대표 : 박건형)
계 약 금 액	금38,673,340원(금삼천팔백육십칠만삼천삼백사십원)
계 약 일 자	2018.05.16.
공 사 기 간	2018.05.16. ~ 2018.06.14.

나. 변경내역 : 기간 변경(2018.05.16. ~ 2018.06.30.)

변 경 내 역	변경전	변경후
기 간 변 경	2018.05.16. ~ 2018.06.14.	2018.05.16. ~2018.06.30.

다. 변경사유 : 공사에 소요되는 관급자재(인조잔디) 납품에 시일이 소요되는 등                      자재수급으로 인한 공사 지연으로 준공기한을 연기하고자 함.

붙   임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 변경계약보증서 1부.

3. 계약의뢰 1부.

4. 공사 계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	06/25 박기용
협조자
시행	총무과-8461	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)