문서번호	주거환경개선과-6552
결재일자	2018.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경행정팀장	주거환경개선과장
정윤진	양성태	06/26 유철호

양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 주거환경관리사업

정비기반시설 공사비 재배정 변경 계획

2018.06.

도시재생본부

(주거환경개선과)

양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 주거환경관리사업

정비기반시설 공사비 재배정 변경 계획

양천구 신월1동 곰달래꿈마을 정비기반시설 공사시행 중 현장 여건 변화에 따른 사업물량 증가로 자치구로부터 예산 추가 재배정 요청이 있어 이를 검토하고자 함

※ 금회 추가 요청액 : ****************************, 부서 : 양천구(균형개발과)

1		사 업 개 요

○ 대상지역 : 양천구 신월1동 232번지 일대 (45,754㎡)

○ 사업내용

: 화단조성, 담장개선, 어린이보호구역 재도색, 반사경 설치, CCTV 개선 및 설치,

도로 미끄럼방지포장, 광고물부착방지판 설치 등

○ 사업기간 : 착공일로부터 180일

○ 공사비 개요

연번	공종	설계금액	공사비(천원)			증감액	비고
			기 재배정	금회 추가요청	총 공사비
1	도로포장	******	******	*****	******	********	일부구간 이면도로 패턴포장 미시행 및 구간변경 (감) 2,130㎡ / (증) 2,380㎡
2	안전시설물	*******	*******	*	*******	*
3	청소환경	******	*	*	*	*********	모아모아하우스(재활용박스) 공사구간 인근 주민 반대
4	쉼터 및 녹지조성 등	*******	*******	*****	*******	********	광고물 부착방지 물량증가 (전구역 확대, 45개소 → 73개소)
총 계		*******	*******	******	*******	*********

(단위 : 천원)

2		추 진 경 위

○ `17.03.23         : 정비구역 지정 및 지형도면 고시 (서울시고시 제2017-106호)

○ `17.07 ~ 12.08    : 정비기반시설 기본 및 실시설계

○ `17.12.07         : 설계 중간보고

○ `18.04.26         : 공사비 예산재배정 (시 → 구)

○ `18.06.21         : 공사비 예산재배정 추가 요청 (구 → 시)

3		검 토 내 용

□ 사업 변경내용

○ 이면도로포장 일부구간 미시행 (6개소 중 5개소)

- 가로시설물 정비 및 도로 패턴포장으로 커뮤니티 가로활성화를 도모코자하였

으나, 일부 대상지가 사유지이고 사업효과에 대한 주민간 의견 차이 및 향후

유지관리의 어려움 등을 고려하여 일부구간 미시행

※ 정비기반시설 실시설계 중간보고 결과 반영 (주거환경개선과-13825, 2017.12.07.)

: 사업완료 후 유지관리가 용이한 방안을 제시하여 주길 바람

○ 과속방지턱 설치 및 미끄럼방지 포장

- 이면도로 포장개선사업을 대체하여 구역 내 통학길, 교통사고 위험구간(주요도로)의

보행자 보호를 위한 과속방지턱 설치 및 미끄럼방지 포장 시행

○ 광고물부착방지 공정변경 및 적용구역 확대

- 당초 도료형으로 설계하였으나 전신주의 기존 이물질 제거를 위한 별도 비용이

추가될 것으로 파악되어 부착형으로 변경

- 구역 내 일부 대상지(45개소) 시행에서 전 구역으로 확대(73개소)하여 시행

□ 정비계획 변경도

○ 도로포장 관련

변경 전(45개소)	변경 후(73개소)

○ 광고물부착방지 관련

□ 검토결과

- 일방통행 미시행으로 구역 내 교통체계에 큰 변화가 없을 것으로 예상되어

현재 차량통행이 빈번한 구간에 미끄럼방지 및 과속방지턱 설치는 적절함

- 광고물부착방지 도료는 부착형에 비해 햇빛에 약하고 비나 먼지로 인해 성능

유지 기간이 짧으므로 변경에 동의하며, 빗물저류배수시설 확충공사로 인해

불필요한 대상지는 제외하고 요청한 것을 확인함. 또한, 전 구역으로 확대하여

미관 향상과 통일된 마을 경관 유지에 대한 효과를 기대함

4		예산 재배정 계획

기 배정액	금회 추가 요청액	재배정 총액	재배정처
*********	********	*********	양천구 균형개발과

○ 재배정요청액

○ 주요 교부조건

- 양천구 신월1동(곰달래꿈마을) 정비기반시설 공사비 외의 다른 용도로 사용할 수 없음

- 구청장은 실시설계 중간보고 결과(주거환경개선과-13825, `17.12.07.)를 반영토록 검토하시고,

반드시 그 조치 결과를 서울특별시장과 협의한 후 확정토록 하여야 함

- 재배정금은 집행완료 후 소정기일 내 관계증명서를 첨부하여 정산 보고하여야 함

○ 예산과목 : 도시재생본부 주거환경개선과, 평생 살고 싶은 마을만들기 추진,

주거지 재생사업 추진(도정), 주거환경 관리사업(도정), 시설비

5		향 후 계 획

○ `18.06.  : 공사비 예산 재배정

○ `18.07.  : 공사 추가발주 및 시행

붙임  1. 시비재배정 교부 결정서 1부.

2. 예산재배정 요청(자치구) 1부.

3. 설계내역서(토목) 1부.

4. 공사계획도(토목) 1부.  끝.