문서번호	설비부-8689
결재일자	2018.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	06/26 권오식
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사 -

관급자재(영상감시장치) 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

도시기반시설본부

설비부

- 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사 -

관급자재(영상감시장치) 납품기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『밤고개로 확장 전기공사』에 소요되는 관급자재(영상감시장치)가 설치시기 미도래로 다음과 같이 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사

□ 공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64일원(중랑물재생센터내)

□ 공사기간 : 총차 `17.11.27.~`20.01.26.(1차`17.11.27.~`18.08.31.)

□ 도 급 비 : 총차 금188,539,126원(1차  금9,866,000원)

□ 계 약 자 : ㈜순성이엔씨 대표 양재희

□ 감 리 자 : ㈜천일

2		관급자재 계약현황

□ 품목별 계약내용

○ 계약건명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사 영상감시장치

****	**	***	*******	****
***********	************	***	**********	**********
***********	********	****	**********	**********

□ 납품기한 연기내용

○ 납품기한 연기근거

- 중랑물재생센터 총인처리시설 통신공사 영상감시장치 납품기한 연장 요청의 건

(중랑감 제18-142호, `18.06.26)

○ 납품기한 연기사유

- 선행 공정 진행과 관련 영상감시장치 설치 시기 미도래로 당초 납품기한 연기가 필요한 실정임.

○ 납품기한 연기 세부 내용

***	****	***	*******	****
				**	**
******* ****** **** ******	***********	***	**********	**********	**********
	***********	****	**********	**********	**********

○ 귀책 소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

3		조 치 계 획

□ 당초 조달 구매 요청한 통신공사의 관급자재(영상감시장치) 납품기한을 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 합의서(납품기한연기) 각1부. 끝.