문서번호	시설과-3942
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
이춘한	오임석	심상원		06/27 송천헌
협 조
	전략기획실장		유연호
	총무과장		代강준민
	주무관		한상길
	주무관		전성완

야구 테마공원 조명시설 설치 계획
야구 테마공원 조명시설 설치 계획

2018. 6.

시 설 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

야구 테마공원 조명시설 설치 계획

우리공원에 조성된 야구장의 야간경기 운영에 필요한 조명시설을 설치하여 이용자의 편의를 제공하고 안전한 야간경기 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 야구테마공원 안전시설 보강 및 조명타워 설치 추진계획수립(시설과-3720 2018.6.19.)

○ 서울대공원 야구장 조성 지원계획(체육진흥과-3634 2018.4.13.)

Ⅱ		사업개요

○ 야구장 정상화 운영을 위한 시설보완(야간조명시설)으로 쾌적한 운동환경 조성

- 성인야구장 1면 조명타워 6기 신설

○ 야구장 야간경기 조도 검토사항(설계과업)

국제야구장 조도(IESNA)		야구장 기준 조도(KS 조도기준)
레크리에이션(Lux)		일반경기(Lux)		프로경기(Lux)
내야	외야	내야	외야	내야	외야
300	200	750	400	2000	1200

- 아마추어 야구경기(사회인 야구)시 적합한 조도 적용

- 이용자의 경험수준이 향상되고 있음에 따라, 조명수준 상향요구에 대비한

조도를 확보할 필요가 있음

○ 조명기구 장.단점 검토사항(설계과업)

메탈등	무전극등	LED등
기존의 경기장에 사용중 재점등시 10분이상 경기지연 전력소모량 많음	일부 경기장에 사용중 전력소모량 중간	최근 등기구로 적용 추세임 재점등시 즉시 가능 전력소모량 적음

- 야간경기중 눈부심 또는 불필요한 조도확산 방지에 적합한 등기구 선정

- 에너지 절약 및 유지관리에 유리한 등기구 선정

○ 타워용 기초설치 검토사항

- 야구장 1루수 및 외야측이 녹지경사면과 절개지이며 포수측은 건물이 위치한바 일반적인 기성제품 적용 가능여부를 검토할 필요가 있음

- 녹지경사면의 경우 불가피한 수목 훼손에 따라 원상복구 방안을 검토할 필요가 있음

- 기초설치 공사는 토목분야에서 구조검토 후 설치토록 협조요청

Ⅲ		추 진 계 획

○ 야구장 야간경기에 적합한 조도 및 등기구 선정을 위한 설계시행

- 설계 용역 타당성 심사 의뢰(서울시) 및 용역발주

- 설계내역 계약심사 의뢰(서울시)

- 공사시행 → 준공

○ 추진일정

- 2018. 6  : 현장조사 및 자료취합

- 2018. 7  : 용역타당성 심사의뢰

- 2018. 8  : 설계 및 발주공사 계약심사 의뢰

- 2018. 9  : 공사발주 및 착공

- 2018. 10 : 준공

Ⅳ		발주방법 및 예산

○ 추정 총공사비 : 500백만원

- 설계용역 : 소액수의계약(20백만원)

- 설치공사(전기.토목) : 일반공개계약(130백만원)

- 조명타워 및 조명기구 : 조달구매 3자단가(200백만원)

- 수배전반설비 : 조달구매 3자단가(100백만원)

- 수용비 및 검사비 : 한국전력외(50백만원)

○ 예산과목 : 2018 생활체육시설 확충 예산 재배정(1,000백만원)

체육진흥과. 시민생활체육 진흥발전. 생활체육인프라 확충.           생활체육시설확충. 시설비(401-1)    끝.