문서번호	기전과-2848
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
양상규		代김용문	06/27 박기범
협조
	주무관		김용문

『2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선사업』

교통신호기 설치공사 시행계획

2018. 6.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선사업』

교통신호기 설치공사 시행계획

“교통사고 사상자 절반 줄이기 프로젝트 추진”의 일환으로 관내 교통사고 잦은 곳 및 교통사망사고 발생지점의 시설개선을 통하여 안전한 도로교통환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

서울지방경찰청 교통관리과-10481(2018. 5. 2.)

【교통사고 잦은 곳 개선사업 교통안전시설 개선설치 통보(하달)】

서울시 교통운영과-9202(2018. 6. 1.)

【2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선사업 예산 재배정 및 사업추진 협조요청】

Ⅱ		사 업 개 요

사 업 명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 등 교통신호기 설치공사

사업금액 : 금347,160,000원(금삼억사천칠백일십육만원정)

구 분		금 액 (원)	비 고
총 공 사 비		347,160,000
도급비	공 급 가 액	224,936,364
	부가가치세	22,493,636
	계	247,430,000
이 설 비		99,730,000	도로굴착복구비 /폐기물처리비 등

※ 이설비 중 폐기물처리는 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조 제1항 및

동법시행령 제11조에 의거 건설폐기물 100톤 이상 발생시 분리발주

사업위치 : 관악구 시흥대로 554 부근 등 3개소(사업위치도 - 별첨)

사업기간 : 2018. 7.  ~  10. 30.

사업내용 : 교통사고 잦은 곳 및 중대한 사고 발생지점 시설개선

- 신호지주 위치조정, 차량등 통합설치, 횡단보도 신설 및 종형 신호등(신설/이설)

- 교통신호제어기 교체 및 통합지주(신호등+가로등) 설치

- 기타 배관/배선 공종 등

Ⅲ		예 산 현 황

예산 배정액 : 383,510,000원

- 교통신호기 : 379,460,000원

- 안전표지 :   4,050,000원

예산과목

- 교통사고 잦은 곳 개선 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사고 잦은 곳 개선

- 교통사망사고 줄이기 사업 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사망사고 줄이기 사업

Ⅳ		발 주 계 획

[ 교통신호기 공사]

공 사 명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기 설치공사

발주금액 : 금247,430천원(이설비 제외)

공사기간 : 착공일로부터 2018. 10. 30일까지

계약방법 : 제한경쟁입찰

입찰참가자격 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 규정에 의거 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허등록업체로서 주된 사업소가 서울특별시에 소재한 업체

하자보증 책임기간 및 요율 : 준공검사일로부터 1년, 2/100

[ 건설폐기물 운반 및 처리용역]

용 역 명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선공사 발생 건설폐기물 처리용역

발주금액 : 금9,032천원

공사기간 : 착수일로부터 2018. 10. 30일까지

계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목(소액)에 의거

Ⅴ		향 후 계 획

2018. 6. 27.  : 공사(용역) 발주

2018. 7.      : 공사(용역) 착공

2018. 10.     : 공사(용역)준공

붙임 : 1. 서울지방경찰청 규제공문 1부.

2. 서울시 교통운영과 공사시행 공문 1부.

3. 설계내역서 1부

4. 설계도면 3부.  끝.

사업위치 및 내용

구로디지털단지입구 : 관악구 시흥대로 554

[T-GIS 명칭 : 구로디지털단지입구]

주 요 공 정

- 신호등지주 위치조정 및 통합(양날개) 설치

- 버스신호등 신설

- 교통신호제어기 교체

- 잔여시간표시기 4개 신설

- 음향신호기 8개 교체

- 기타 배관/배선 및 교통안전표지 1식

원당초교입구 : 관악구 남부순환로 1852

[T-GIS 명칭 : 원당초교입구]

주 요 공 정

- 통합(신호등+가로등) 신호등지주 신설

- 부착대 길이 조정에 따른 신호등지주(양날개) 교체

- 신호등 5면 철거

- 종형 신호등 이설

- 음향신호기 7개 교체

- 기타 배관/배선 및 교통안전표지 1식

신림소방치안센터 : 관악구 봉천동 729-29

[T-GIS 명칭 : 롯데백화점관악]

주 요 공 정

- 횡단보도 신설

- 신호등지주 신설

- 통합(신호등+가로등) 지주 신설

- 종형신호등 신설

- 음향신호기 및 잔여시간표시기 신설

- 기타 배관/배선 및 교통안전표지 1식