위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	문화체육관광부장관(문화기반과장)
(경유)
제목	총사업비 조정요구서(사업기간 연장) 제출

1. 문화체육관광부 문화기반과-2675(2018.6.21.) 및 중구청 건축과-13016(2018.6.25.)호와 관련입니다.

2.「서소문밖 역사유적지 관광자원화 사업」과 관련하여 총사업기간 변경(연장)이 있어 조정요구서를 제출하오니, 검토하여 주시기 바랍니다.

가.총사업기간 변경사항

	변경전	변경후
사업기간	2013.1 ∼2018.6	2013.1∼2018.10(4개월연장)
변경사유	관급자재(레미콘) 공급 부족에 따른 공사기간 연장

붙임 : 1. 중구청 공문 1부.

2. 총사업비 조정요구서 1부.

3. 증빙자료 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정은		지역관광진흥팀장	유형석		관광정책과장	06/27 김재용
협조자
시행	관광정책과-8067	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)