문서번호	물재생시설과-8328
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김병오		정훈모	06/27 이인근
협조

「차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 」설계변경 검토보고

2018. 6.

“ 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역  ”

설계변경 검토보고

우리 시에서 시행 중인 “차집관로 성능개선 기본 및 실시설계”에 대한 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계

□ 용역기간 : ‘16.4.15 ~ ’18.6.30

□ 도 급 액 : 금일십사억육천사백칠십만원정(￦1,464,700,000)

□ 계 약 자 : ㈜이산 외 2개사

□ 주요 과업내용

〇 차집관로 기본 및 실시설계(1.5Q 미만) 11.2㎞ 및 기타

〇 현황조사 및 측량 후 조사자료 분석 및 지표 설정

〇 경제성 등 타당성 분석 등

Ⅱ		추진경위

□ ‘16.  4. : 용역계약 및 착수

□ ‘16.  6. : 용역 착수보고

□ ‘16.  6. : 개봉1빗물펌프장 내 차집관로 설치요청 검토보고

□ ‘16.12. : 자문회의 개최, 1차 기성(560백만 원)

□ ‘17. 3. : 투자심사 시행(개봉유수지)

□ ‘17.10. : 2차 기성(540백만 원)

□ ‘18. 2. : 자문회의 개최

□ ‘18. 3. ~ ’18.4. : 설계의 경제성(VE) 검토시행

※ 2018년도 차집관로 성능개선(시설비) 예산 활용 계약심사과 의뢰 시행

□ ‘18. 6 : 건설기술심의(기술심사담당관)

Ⅲ		관련근거

□ 물재생시설과-3436(‘16.06.23.) : 개봉1빗물펌프장(구로구) 내 차집관로 설치요청 검토보고

□ 물재생시설과-3436(‘18.03.09.) : 설계경제성 검토 시행계획 보고

Ⅳ		설계변경 주요내용

□ 설계변경 현황

1) 설계 자문비

- 자문회의 참석위원 지급 수당 실 정산

· 1차 자문 : 150,000원 × 4인 = 600,000원

· 2차 자문 : 150,000원 × 5인 = 750,000원

공 종	변경 전	변경 후	증・감
기본 및 실시설계비	11.2km	11.2km
관거노선 측량	11.2km	11.2km
유량 및 수질조사	4지점 3회	4지점 3회
토질조사	4공	4공
토질시험	4회	4회
자문회의비	15인	9인	감) 6인

※ 설계경제성 검토 (계약심사과에서 시행 → 별도 예산집행)

Ⅴ		설계변경액

(단위 : 원)

용 역 명	구 분	금 액		증, 감
		당 초	변 경
차집관로 성능개선 기본 및 실시설계	총차	1,464,700,000	1,463,710,000	감) 990,000
	금회	1,100,000,000	1,463,710,000	증) 363,710,000

Ⅵ		조치계획

□ 차집관로 설계물량 변경 사항을 반영하여 설계변경(정산) 처리하고자 함

붙임 : 가. 설계변경 사유서 1부.

나. 설계변경 내역서 2부.

다. 검토보고서 2부. 끝.