위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통신호기공사(천호대로 연장) 감리원 배치기간 연장에 대한 회신 안내

1. 도시기반 설비부-8723호(2018. 6.26)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련「천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사」 중 교통신호기공사에 대한 감리원 배치기간 연장요청에 대하여 승인하며, 교통신호기공사 변경설계내역서를 감리원 승인후 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 감리업체(감리원)은 경찰청 교통안전시설 개선(변경)통보 관련 추가 공사 발생에 따른 공사기간이 연장됨에 따라 감리원 배치기간을 변경 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 교통신호기공사 감리원 배치기간

- 당초 : 2018. 3.13. ~ 6. 30.

- 변경 : 2018. 3.13. ~ 7. 30.

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)트래픽스 대표,서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	최성일		신호시설팀장	김창중		교통운영과장	06/27 代최진경
협조자
시행	교통운영과-10612	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2483	/전송	02-2133-1053	/		/	대시민공개