★◉

문서번호	치수과-8314
결재일자	2018.6.27.
공개여부	비공개

주무관		하수계획팀장		치수과장	안전건설교통국장
조찬우		백원기		박주완	06/27 김재겸
협 조
	계약팀장		양영종			재무과장		임창윤

- 성수동2가 656-609일대 하수관로 개량공사 -

설계변경 시행 검토 보고

2018. 6

성   동   구

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 예산 사용 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

-성수동2가 656-609일대 하수관로 개량공사-

설계변경 시행 검토 보고

우리구에서 시행중인 『성수동2가 656-609일대 하수관로 개량공사』의 시공 물량 증·감사항에 대하여 설계변경 시행 하고자함

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 성수동2가 656-609일대 하수관로 개량공사

○ 위    치 : 성수1가동 656-611 ~ 656-417 등 5개소

○ 규    모 : 하수관로 개량 D=300~800mm L=860m, 맨홀정비 16개소, 빗물받이 정비 42개소

○ 사업기간 : 2018. 04. 03. ~ 2018. 10. 29.

○ 총사업비 : 668,940천원(시비)

○ 도 급 자 : ㈜풍산씨앤씨 (대표: 하종수)

▢ 설계변경 사유

○ 하수관로 공사 구간에 정비소, 공장 등 주변 상인의 생존권 보장과 민원예방을 위한 야간공사 시행[치수과-5068(2018.4.18)]

○ 공사구간 중 아차산로11길38 ~ 아차산로 11길26에서 당초 반영되지 않은 콘크리트 포장이 나와 포장깨기 변경[치수과-5178(2018.4.23)]

○ 아스팔트 및 보도구간에 상가 및 자동차정비소 등이 산재되어 있어 주민들의 안전한 통행 및 및 비산먼지 방지 등을 위해 임시포장 시행[치수과-5178(2018.4.23)]

○ 공사구간 중 성수동1가 656-611 ~ 656-417 보도굴착 구간에 보도 노후화로 콘크리트사각블록(투수블록)으로 교체 및 측구, 경계석, 가로수보호판 정비 시행

[치수과-5802(2018.5.3)]

○ 물량 증․감 내역

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증․감
기계터파기(야간)	m3	-	513	증)513
콘크리트 포장깨기	m3	-	26.1	증)26.1
흄관부설(D450mm)	m	245.6	123.6	감)122
흄관부설(D450mm)_야간	m	-	122.0	증)122
흄관부설(D800mm)	m	171.5	86.5	감)85
흄관부설(D800mm)_야간	m	-	85.0	증)85
빗물받이 설치(300*400)	개소	-	5	증)5
보도블록(고압블록) 포장	a	14.92	-	감)14.92
투수블록(일반구간) 포장	a	-	9.28	증)9.28
절삭 후 덧씌우기	a	-	28.81	증)28.81
보차도 경계측구	m	-	191.88	증)191.88
수목보호판	개소	-	15	증)15

▢ 설계변경 내역

구 분	원 설 계	변경설계	증 ․ 감	비 고
총공사비	618,709,700	668,940,000	증)50,230,300
도 급 비	361,209,700	439,800,000	증)78,590,300
관 급 비	85,988,000	117,949,970	증)31,961,970
이 전 비	171,512,000	111,190,030	감)60,321970

▢ 조치의견

○ 상기 내용과 같이 물량 증·감 등에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율 검증 확인서 1부.

3. 실정보고서 각1부