문서번호	토목과-6561
결재일자	2018.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장	안전건설교통국장
방찬혁		조영두		오석관	전결 06/27 김재겸
협조

★ ◉

『응봉교 앞 보도육교 보수공사』

준공검사 보고

2018.  6.

성   동   구

(토 목 과)

『응봉교 앞 보도육교 보수공사』

준공검사 보고

☐ 공사 개요

❍ 공 사 명 : 응봉교 앞 보도육교 보수공사

❍ 공사기간 : 2017. 12. 11. ~ 2018.6.25.

❍ 도 급 액 : 금140,088천원

❍ 계 약 자 : ㈜ 주안이앤씨 대표 유 철 주

☐ 보고 내용

❍ 공사 내용

- 표면처리 및 중방식 도장 856㎡, 콘크리트 그라인딩 225㎡

- 철판교체 및 보수 0.25ton, 기타 부대공 1식

❍ 준공 내용

계약내용		준공내용
계약금액	140,088천원	준공금액	140,088천원
계약일자 (변경계약일)	2017. 12. 11. (2018. 5. 9)	착 공 일	2017. 12. 15.
준공기한	2018. 6. 30.	준 공 일	2018. 6. 25.

※ 보수공사 중 확인된 주요 부재의 단면결손에 따라 보수공사 중지하고 기 보수내용만으로 정산 준공.

※ 미사용 자재 인계인수, 보관증 확인서

- 계단 논슬립: 338EA

- 중방식 도장재: 하도18L, 중도18L, 상도 233.6㎡

- 엘라스콘 수지(미끄럼 포장재): 224.5㎡

☐ 조 치 의 견

❍ 상기 공사의 준공검사 결과, 이상이 없으므로 준공 처리하고자 함

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 사진대지 3부.

3. 인수인계서 1부.

4. 보관증 1부.  끝.