	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역 변경계약(전체4회) 의뢰

우리본부에서 시행중인 『천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 토목공사 공기연장에 따라 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니, 조치하여 주시기  바랍니다.

가. 용 역 명 : 천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : '17.11.07. ~ '18.06.30.

다. 도 급 비 : 211,840,000원

라. 도 급 자 : ㈜상우이디아이 외 1

마. 예산과목 :

○ 교통사업특별회계, 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 천호대로 중앙버스 전용차로 확충, 시설비

바. 설계변경 내역

【단위 : 천원】

구 분	용 역 비			공 사 기 간		비고
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경
전체 2회	211,840	211,840	-	‘17.11.07 ~’18.06.30	‘17.11.07 ~’18.12.20

붙  임 : 관련공문 및 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	권순환		교량건설과장	代김동현		토목부장	전결 06/27 김영수
협조자
시행	토목부-11179	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2577	/전송	3708-2599	/	ksh1216@seoul.go.kr	/	부분공개(5)