자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의위원회 개최[2017년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)]

우리 사업소에서 시행 중인“2017년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)”에 대해

신규 공종 및 물량 증·감에 따른 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의위원회를 개최코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2017년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요  - 당초 : D = 13~300mm, L = 1,641m

- 변경 : D = 13~300mm, L = 1,426m

다. 공사기간 : 2017. 7. 10. ~ 2018. 6. 30.

라. 도 급 비

구 분	당 초	변 경	증, 감	기 간
총부기금액	************	************	**********	**********************

마. 시 공 사 : ***************

2. 심의회 개최 현황

가. 심의 일정  : 2018. 06. 27(수) 10 : 00

나. 심의 장소  : 급수운영과

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라.  심 의 위원  : 시설7급 윤승구, 시설7급 이한수, 시설7급 박상권, 시설7급 정성식

3. 심의내용

가. 설계변경의 타당성

나. 제경비 적정산정 및 적정적용

다. 부대공 및 신규공종 적정산정

라. 기타 제반규정 적정 준수여부 등

첨 부 : 1) 설계변경 심의 요청 및 사유서 각 1부

2) 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	권택중		급수운영과장	06/27 장종욱
협조자	주무관	김성호
시행	급수운영과-11384	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3373	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(5)