투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행 및 변경계약 의뢰(남부도로사업소 제설전진기지 조성공사)

우리부에서 추진중에 있는「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」의 설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

2. 도 급 자 : 우륭건설(주) 대표 최부영

3. 설계변경내역(도급비）

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
총공사비		2,136,233,000	2,175,349,000	증)39,116,000
도급비	공급가액	1,942,030,000	1,977,590,000	증)35,560,000
	부가세	194,203,000	197,759,000	증) 3,556,000
	계	2,136,233,000	2,175,349,000	증)39,116,000

- 변경사유 : 현장실정보고 승인 반영 및 시공물량 정산

4. 공사기간 : 2017.09.13. ~ 2018.6.30.(변경없음)

5. 예산과목 : 안전총괄본부 도로관리과, 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선(도시개발), 도로사업소 청사신축, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 :  1. 설계변경(정산) 검토보고서 1부.

2. 공단문서 및 보고서 1부.

3. 설계변경내역서(정산) 1부.

4. 합의각서 1부. 끝

	방재시설부장
주무관	이민영		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	06/27 이임섭
협조자
시행	방재시설부-8301	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	min02@seoul.go.kr	/	부분공개(5)