위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(정산)시행 및 변경계약의뢰(반포교 외6개소 내진성능평가)

1. 교량안전과-11152호(2018.06.26.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인 『반포교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역』에  대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행코자 하니 변경계약을 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 반표교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역

나. 용역기간 : 2018.01.15 ~ 2018.06.30

다. 도 급 자 : ㈜대한콘설탄트 대표 이진산

라. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감
총용역비	156,238,000	64,949,000	감 91,289,000
순용역비	155,038,000	64,949,000	감 90,089,000
이전비(자문비)	1,200,000	-	감 1,200,000

마. 설계변경 사유 : 당초 과업 수행에서 제외된 시설물에 대한 용역비 정산 및 자문비 감액

바. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 내진보강공사, 시설비

붙 임  1. 설계변경(정산) 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	서성만		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	06/27 한유석
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-11222	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개