투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 변경계약 의뢰(노들섬 특화공간조성 토목공사)

1. 우리 부에서 시행중인 『노들섬 특화공간조성 토목공사 건설폐기물처리용역(총차)』설계변경 및 준공기한 연장에 따라 변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사 건설폐기물처리용역(총차)

나. 용역업체 : ㈜문안이엔티 외 1

다. 변경내역

구 분		변경 전	변경 후	비고
총차 (2회)	계약기간	`17.11.13.∼`18.12.20	`17.11.13.∼`19.4.27	증 128일
	계약금액	348,447,000원	349,324,000원	증 877,000원

라. 예산과목 : 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간확충(도시개발), 노들섬특화공간 조성사업, 시설비

붙임 : 1. 검토보고서  1부

2. 합의각서  1부.  끝.

	토목부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	06/27 김영수
협조자	경리과장	최정수
시행	토목부-11067	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(7)