투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행[2017년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기공사(양강중학교 앞)-강서]』

『2017년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기공사(양강중학교 앞)-강서』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2017년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기공사(양강중학교 앞)-강서

2. 공사기간: 2017.11.28. ~ 2018.06.30.

3. 공사위치: 양천구 오목로 121(양강중학교 교차로)

4. 계약업체: 주식회사 화일이엔에프 대표 박광섭

5. 설계변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비		114,385,780	132,875,380	증)18,489,600
도급비	공급가액	102,723,436	115,148,000	증)12,424,564
	부가가치세	10,272,344	11,514,800	증) 1,242,456
	계	112,995,780	126,662,800	증)13,667,020
관급자재비		0	0
이 전 비		1,390,000	6,212,580	증) 4,822,580

6. 설계변경 사유

가. 신규 비목 추가 및 계약물량 증·감에 따른 도급비 증액 : 금13,667,020원

나. 보험료 정산(건강보험료, 연금보험료 등)

다. 산업안전보건관리비 및 퇴직공제부금비 정산

7. 예산과목

- 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화

교통사고 잦은 곳 개선, 시설비(401-01) : 93,640,000원(국비 50%, 시비 50%)

- 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화

교통사망사고줄이기사업, 시설비(401-01) : 39,235,380원(시비)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 설계변경내역서 갑지 및 설계변경내역서 1부.

4. 보험료 정산 동의서 1부.

5. 고용·산재 보험료 완납증명원 1부.

6. 합의 각서 1부.

7. 검증확인서 1부.  끝.

주무관	정경성		기전과장	代박주호		강서도로사업소장	06/28 김용제
협조자	과적단속팀장	代윤성일
시행	기전과-5512	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동)	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/	jks00@seoul.go.kr	/	부분공개(7)