문서번호	대외협력담당관-6209
결재일자	2018.6.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	지역협력팀장	대외협력담당관
백경진	이대희	06/28 김규룡

- (가칭)지역상생교류센터 조성공사(건축)

공사기간 연장 검토보고

2018. 6.

기 획 조 정 실

(대외협력담당관)

-(가칭)지역상생교류센터 조성공사(건축)

공사기간 연장 검토보고

(가칭)지역상생교류센터 조성공사(건축)와 관련하여 공사기간 변경이 발생함에 따라 아래와 같이 검토 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : (가칭)지역상생교류센터 조성공사(건축)

○ 계약대상자 : *************************

○ 계약금액 : *********************************

○ 공사기간 : 2018. 5. 3 ~ 7. 2 (착공일 : 2018. 5. 4)

○ 주요내용 : 상생상회((가칭)지역상생교류센터) 내부 인테리어

- 위   치 : 종로구 율곡로 39 안국빌딩 신관 1층~지하1층

- 규   모 : 지상1층(415㎡), 지하1층(495㎡), 총 면적(910㎡)

□ 공사기간 연장내역 및 사유

○ 공사내역(기간연장)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
기 간	18. 5. 3 ~ 7. 2	18. 5. 3 ~ 7. 31	29일 연장
계약금액	*************	*************	변경없음

○ 연장사유

- 운영협의회 등 전문가 자문 의견수렴(공간운용 계획 변경)에 따른 보완공사 필요, 소방(기계)관련 공사 이후 관할소방서 지도에 따라 현장점검 실시 필요(점검업체 계약 지연), 공사소음 등으로 민원 발생 → 당해 계약 기간내 준공 어려운 관계로 공기연장 사유 발생

□ 검토 및 조치의견

○ 검토결과 : 공사기간 연장사유가 인정됨

- 연기사유 귀책소재 : 우리시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 조치의견 재무과에 계약변경 의뢰코자함

붙임 : 1. 합의각서(안) 1부. 끝.