문서번호	설비부-8899
결재일자	2018.6.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
호정오		김은덕	전결 06/28 권오식
협조

『퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차)』

설계변경 검토 보고

2018.  06.

도시기반시설본부

[설  비  부]

『퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차)』

실정보고 내용 검토 보고

「퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차)」와 관련하여 감리업체가 제출한 설계변경의 내용을 검토하고 결과를 보고함.

공사개요

□ 공 사 명 : 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차)

□ 공사위치 : 퇴계로 회현역 5번출구~퇴계로2가 사거리(L=1.1㎞)

□ 공사내용 : 가로등주 신설 84본, 교통신호기 5개소, 분전반 4면

□ 계약금액 : 724,479,330원

□ 공사기간 : 2017.05.17. ~ 2018.06.29.

□ 계약업체 : ㈜케이비이앤씨

□ 감리업체 : ㈜트래픽스

관련근거

□ ㈜트래픽스 TR-감-180614(2018.06.27.)

- 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차) 설계변경 제출 건

검토내용

□ 설계변경사유

- 서울지방경찰청(교통관리과) 변경규제로 가로등 및 신호등 설치 변경

- 퇴계로 남산측(회현사거리~퇴계로2가 지하차도 앞) 토목공정 미시행으로 가로등 설치 변경

- 설계 오류 및 현장실정에 맞는 공정 반영으로 가로등 설치, 신호등 설치, 교통신호감시시설 및 광통신/자가망시설 변경 및 추가

- 검사비 및 모범운전자 비용 반영

- 보험료 등 제경비 정산

□ 주요 변경내용

구 분	공 종	주요 변경내용	소요금액
도급 공사	가로등 설치	- 가로등주 철거 20본(감) - 가로등주 설치 21본(감) - 기초철거 29개(감) - 기초설치 30개(감) - 보도굴착 546m(감) - 보행등 설치 63개(증)	감33,960천원
	신호등 설치	- 제어기 철거 2개(감) - 신호등 철거 12개(감) - 신호등 설치 34개(감) - 신호등주 철거 5본(감) - 신호등주 설치 10본(감) - 제어기 좌대 및 기초철거 4개(증) - 제어기 신설 4개(감) - 음향신호기 설치 8개(감) - 부착대 설치 6개(증) - 기타 신호등 전선 및 전송선 설치 1식 등(감)	감138,163천원
	교통신호 감시시설	- 신설 6개 → 이설 6개(변경)	감43,006천원
	제경비 등	- 간접노무비, 기타경비, 산업안전 보건관리비, 보험료 등 정산	감153,236천원
	부대비용	- 검사비 및 모범운전자 비용	증8,372천원
	광통신/ 자가망	- 광통신/자가망 철거 및 설치(추가)	증61,568천원
	합 계		감298,425천원

□ 설계변경금액(총괄)

구 분		당 초	변 경	증 감 액
도급공사	총차	785,969,330원	487,544,000원	감)298,425,330원
	2차	724,479,330원	426,054,000원	감)298,425,330원

감리단 의견

□ 실정보고 승인내용 반영한 내역서 변경, 실제 시공물량 정산, 검사비, 모범운전자 비용 반영 및 보험료 등의 제경비 정산에 의한 설계변경으로 적정한 것으로 판단

검토결과 조치계획

□ 감리단 검토의견이 적정한것으로 판단되어 설계변경을 승인하고, 설계변경사항 반영 계약변경 의뢰조치

붙임  설계변경 제출 1부. 끝.