투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(총액계약건) 납품기한 연기 요청(한남2고가)

1. 우리 부에서 시행 중인 「한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사」에 소요되는 관급자재에 대한 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 관급자재 납품기한 연기사항

품 명	업 체 명	계약번호	납품기한 연기사항		연기사유
			당 초	변 경
아스팔트콘크리트 (표층용) 2종	******	2018010A94500	2018.06.30.	2018.11.30.	납품시기 미도래

붙 임 : 물품계약서 및 납품기한연기합의서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	임준우		도시고속도로과장	명경출		토목부장	06/28 김영수
협조자	주무관	백종임
시행	토목부-11294	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	junu0301@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)