위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	조달품목 납품기한 연장 요청

1. 대외협력담당관-4120(2018. 4. 25.)호와 관련입니다.

2. 우리과 상생상회 조성공사의 관급자재 조달구매건과 관련하여 납품기한 연장이 필요하여 요청드리니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 관급자재 조달구매-상생상회 냉난방기 설치 공사

*****************************

*************************************

라. 발주일자 : 2018. 4. 25.

마. 납품기한 : 2018. 6. 24.

바. 납품기한 연기

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
기 간	18. 4. 25 ~ 6. 24	18. 4. 25 ~ 7. 31	37일 연장
계약금액	************	************	변경없음

사. 납품기한 연기사유 : 내부 인테리어 공사 연기로 인해 납품기한 연장 필요

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 납품기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	대외협력담당관
주무관	백경진		지역협력팀장	이대희		대외협력담당관	06/29 代심혁보
협조자	계약2팀장	이태영
시행	대외협력담당관-6273	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 대외협력담당관	/
전화	2133-6660	/전송	2133-0820	/		/	부분공개(5)