문서번호	도로시설과-5180
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
이기승		김두석	05/09 이철
협조

- 청계천복개구조물 보수 -

예산 재배정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

안전총괄본부

(도로시설과)

예산 재배정 검토 보고

- 청계천복개구조물 보수공사 -

2018년 도로시설물 유지관리사업「청계천 복개구조물 보수공사」추진을 위한 도로사업소 예산 재배정 검토 보고

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제25조

- 시설물의 안전 및 유지관리 예산 확보

○ 2015년 정밀안전진단 및 2017년 정밀점검 용역

⇒ 점검결과 신축거동과 안전성 확보를 위해 받침장치 교체 필요

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 청계천복개구조물 보수공사

○ 위    치 : 황학교 ~고자산교

○ 사업내용 : 받침교체 44EA, 단면보수 284㎡등

○ 예 산 액 : 700,000천원

○ 사업기간 : 2018. 2 ~ 2018. 12

	《청계천복개구조물》
◇ 위치 / 노선 : 중구 수표동 ~ 성동구 마장동 / 청계천로 ◇ 준공일 / 규모 : ‘05.09.30 / 연장 1,406m, 폭 4.5~17.6m (성동구간) ◇ 종별 / 상태등급 / 구조형식 / 유지관리기관 : 1종 / B / Con'c Box / 성동도로사업소

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 금회 재배정 요청

○ 청계천 복개구조물(좌안) 보수 공사비 : 432,300천원

- 공 사 비 : 432,300천원

□ 재배정 검토

○ 요청 사업 추진의 필요성 : 필요

- 정밀안전진단등 안전점검에서 발견된 누후 및 손상된 받침장치에 대한 보수공사비 집행

○ 요청 사업비의 적정성 : 적정

- 설계내역 및 산출내역 확인

○ 예산 재배정(안)                                    (단위 : 천원)

예산과목	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	재배정처
계	700,000	15,850	432,300	251,850	- 성동도로사업소 시설보수과

Ⅲ		추진계획

□ 추진일정

○ 2018. 02. : 예산 재배정

○ 2018. 03. ~ 04. : 실시설계 용역시행

○ 2018. 05. ~ 12. : 공사 계약 및 시행

붙임   1. 위치도 및 현황사진

2. 도로사업소 요청서류 일체.    끝.

□  위치도 및 현황사진

위   치   도

현 황 사 진