위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	한밭조경 대표, (주)그린동현 대표, 건원엔지니어링 감리단장 귀하
(경유)
제 목	119극기훈련시설 설치공사 조속 준공 및 계약금액 변경 요청

1. 관련근거

가. 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제30조(지연배상금), 제30조의2

***********************************************************************

다. 한밭 제2018-57(2018.06.27.)호 “「119극기훈련시설 설치공사」 설계변경에 실정보고서 제출 건”

2. ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 제공된 설계도서대로 조속한 시일내 완공하시고 승인된 구조변경내역은 계약변경하여 준공하여 주시기 바랍니다.

가. 공사건명 : 119극기훈련시설 설치공사

- 계약번호 : 20170*******01(2017.12.11. 변경계약)

- 준공기한 : 2018.01.20.(토)

- 계약금액 : 금821,922,900원

- 지체상금율 : 0.05%/일(준공검사 완료시까지)

**************************************

********************************************

****************************

********************************************

********************************************

*****************

*****************************************

*********************************************

붙임  변경계약시 구조검토 증감내역(토문건축사사무소) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★담당자	곽민규		단장	박정경		소방행정과장	06/29 김선영
협조자
시행	소방행정과-15772	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1393	/전송	02-3706-1329	/	119mk2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)