투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	변경(1차 및 2차) 계약의뢰(올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사」에 대해 아래와 같이 변경(1 및 2차) 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사

나. 공사금액 : ***********************************************

다. 공사기간 : 2017.03.02.~ 2018.11.29.

라. 시 공 사 : 태승전력(주) 대표자 김태민

마. 변경(1차 및 2차) 계약의뢰 현황

구 분		당 초	변 경	증·감
1차	계약금액	금***********원	금***********원	-
	계약기간	’17.03.02.~’18.06.30.	’17.03.02.~’18.06.30.	-
2차	계약금액	금***********원	금***********원	-
	계약기간	’18.02.01.~’18.11.29.	’18.02.01.~’18.11.29.	-

바. 변경사유 : 전기공사 1차수와 2차수 내용(계약물량) 조정

사. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치/                     여의교 확장 및 여의교 남단 교차로 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 변경계약내역서(1차, 2차) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	박희정		열빛총괄과장	유병기		설비부장	06/29 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-8971	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	pakei27@seoul.go.kr	/	대시민공개