투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	"제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사" 외 1건 변경계약 의뢰

1. 시설과-3941(2018.6.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 “제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사”외 1건에 대해      다음과 같이 준공기한 연기 및 보험료 정산에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여       주시기 바랍니다.

가. 변경내용

1) 준공기한

구 분	계 약 명	계약자	공사(용역) 기간		비고
			변 경 전	변 경 후
전기공사	제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사	㈜광신이앤씨 대표 조영훈	2018.4.6 ~ 2018.7.10	2018.4.6 ~ 2018.9.9	61일 연장
전기공사 감리용역	제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사 감리용역	㈜극동문화 전기설계 대표 김경용	2018.4.6 ~ 2018.7.14	2018.4.6 ~ 2018.9.13	61일 연장

2) 계약금액

구 분	계 약 명	계약자	계 약 금 액		비고
			변 경 전	변 경 후
전기공사 감리용역	제3아프리카관 방사장 환경개선 전기공사 감리용역	㈜극동문화 전기설계 대표 김경용	15,780,000	15,720,000	감 60,000

나. 설계변경 사유

- 토목 등 선행공정인 “제3아프리카관 환경개선공사”의 준공기한이‘18.8.30까지            연기됨에 따라 후속 전기공사의 연기가 필요하며

- 전기공사 감리용역 손해배상 공제보험료 실납부액으로 정산함에 따라 변경계약 필요

다. 지체상금 부과대상: 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 2부.  끝.

	시설과장
주무관	전성완		주무관	代전성완		시설과장	전결 06/29 代조대복
협조자	주무관	정한성
시행	시설과-3995	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7431	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	부분공개(5)