＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	2차(최종) 설계 변경에 따른 계약 의뢰(2017년 강동구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

우리 사업소에서 시행 중인 「2017년 강동구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)」과 관련하여 아래와 같이 2차(최종) 설계 변경에 따른 변경 계약을 의뢰합니다.

가. 용역명: 2017년 강동구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)

나. 공사 개요

- 당초: 폐기물 운반 1,534m3, 폐기물 처리 3,582톤

- 변경: 폐기물 운반 1,598m3, 폐기물 처리 3,724톤

다. 용역 기간: 2017. 6. 27.~2018. 6. 30.

라. 계약자: ㈜청한공영 대표 서종근

마. 변경 사유: 계약물량 증·감 발생

바. 변경 내역

구분	금액(원)		증·감(원)	비고
	당초	변경
총계약금액	**********	***********	**********	총계약금액 변경
1차금액	**********	**********
2차금액	**********	**********

붙임  1. 설계 변경 시행 공문 1부.
2. 설계 변경 심의 의견서 1부.
3. 설계 변경 내역서 1부.
4. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	백창진		주무관	송종범		시설관리과장	06/29 김태형
협조자
시행	시설관리과-11879	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5194	/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(7)