투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(퇴계로 도로공간재편사업 전기공사-2차)

우리 부에서 시행중인 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차)와 관련하여 아래와 같이 설계

변경에 대하여 계약의뢰를 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차)

2. 공사기간 : 2017.05.17. ~ 2018.06.29.

3. 계 약 자 : ㈜케이비이앤씨 대표 고병길

4. 설계변경금액

구 분		당 초	변 경	증 감
도급비	총차	785,969,330원	487,544,000원	감)298,425,330원
	2차	724,479,330원	426,054,000원	감)298,425,330원

5. 변경사유 : 실정보고 승인내용을 반영한 내역의 변경 및 보험료 등 제경비 정산

6. 예산과목 : 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경 개선, 한양도성안 도로공간재편

(퇴계로), 시설비

붙임  1. 보고서 1부.

2. 설계변경 제출(내역서, 도면 등) 1부.

3. 계약금액조정검증확인서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	호정오		건축설비과장	김은덕		설비부장	전결 06/29 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-8944	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(6)