투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역 준공기한 연기 의뢰

1. 토목부-11292호(2018. 6. 28.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역

2) 용역규모

가) 월드컵대교 남단 연결로(Ramp-A ~ Ramp-F) 형식변경 등

나) 강남방향은 지하차도를 교량으로 형식변경

다) 연결로 신설 및 변경에 따른 접속교 종단선형 검토

3) 계약기간 : 2017. 8. 7. ~ 2018. 6. 30.

4) 용 역 비 : 917,600,000원

5) 계 약 자 : ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링

나. 준공기한 연기 : 62일

1) 계약기간 : 당초 ′17. 8. 7.~′18. 6. 30. ⇒ 변경′17. 8. 7.~′18. 8. 31.

2) 귀책소재 : 서울특별시

3) 지체상금 : 미 부 과

4) 연기사유 : '18. 4. 최종 노선선형 확정 후 지하매설물 조사결과 통신, 한전, 도시가스 등 예상하지 못한 지장물 저촉으로 인한 선형 조정 및 실시설계(안) 관계기관 협의 등 설계 완성도 확보를 위하여 2개월의 설계기간 연장이 필요

다. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설, 시설비

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 설계감리자 준공기한 연기요청에 대한 검토 의견 1부.

4. 설계용역자 준공기한 연기요청 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김동수		토목설계과장	안규홍		토목부장	06/29 김영수
협조자
시행	토목부-11295	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개